문서번호	시설과-22710
결재일자	2022.08.11
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
시설관리팀장		시설과장
김현태		08/11
		代하종식
협 조
	주무관		정인수

서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계) 실정보고에 대한 검토 보고

서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계)

실정보고에 대한 검토 보고

2022.  8.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계)

실정보고에 대한 검토 보고

『서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계)』와 관련하여, 시공사로부터 실정보고에 대한 적정성 검토 결과를 보고합니다

Ⅰ		관련 근거

ㅇ 공사실정보고 서류제출건 (2022-8-1호, 2022. 8. 10.)

Ⅱ		공사 개요

ㅇ 공 사 명: 서울숲 보행로 노후 공원등 개선 공사(2단계)

ㅇ 공사위치: 서울숲 공원 내

ㅇ 공사기간: 2022. 6. 7. ~ 2022. 8. 20.

ㅇ 공사내용: 노후 공원등 254등 교체와 노후 경관조명 78등 교체

ㅇ 계약금액: **************

ㅇ 계약업체: ********  대표 ***

Ⅲ		실정 보고

ㅇ 설계 변경 금액

구 분[도급비]	변경 전	변경 후	증/감 금액
총공사비(원)	***********	***********	************
공급가액(원)	***********	***********	************
부가가치세(원)	**********	**********	***********

ㅇ 주요 실정 보고

공 종	변경 전	변경 후	변경 사유	증/감 금액[원]	비 고
공원등 인력시공 철거/설치	0[본]	30[본]	기계시공에서 인력시공으로 변경	************	신규 일위대가
현장교통정리	0[인]	23[인]	설계내역서에 신호수 미반영	***********
공원등 주내배선 철거/설치	0[개소]	256[개소]	설계내역서에 주내배선 미반영	***********	신규 일위대가
공원등 기계시공 철거/설치(추가)	0[본]	1[본]	D구간 1본 설계 누락 반영	*********
제경비 정산	*************	*************		***********

Ⅳ		검토 의견

ㅇ 실정 보고 내용 검토 결과

- 공원등 기계시공이 불가능한 장소에는 안전사고(고소차 전복, 추락사고 등)를 예방하기 위해 인력시공이 필요하다고 판단됨

- 공원이용객의 안전과 원활한 통행을 위해 신호수 배치가 적합함

- 공원등 주내배선 철거 설치 공종은 자체 설계 당시 미반영된 사항으로 반영하였음

ㅇ 시공사 실정 보고를 검토한 바, 적합한 것으로 판단되어 승인 통보하고 설계 변경 계약을 시행하고자 함

Ⅴ		향후 계획

ㅇ 2022. 8. 12.  설계변경 계약 의뢰

ㅇ 2022. 8. 19.  공사 준공

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 실정보고 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.