투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	지체상금 세입조치(선유도공원 오수처리시설 정비 공사)

1. 시설과-23518호(2022. 8. 10.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 "선유도공원 오수처리시설 정비 공사" 검사 진행 중 준공기한을 초과한 부분에 대하여 지방계약법 제30조에 의거 지체상금을 부과하고 아래와 같이 세입조치 하고자 합니다.

가. 공사명: 선유도공원 오수처리시설 정비 공사

나. 계약금액: 금156,925,000원(금일억오천육백구십이만오천원)

다. 계약일자: 2022. 6. 20.

라. 준공기한: 2022. 7. 19.

마. 검사완료: 2022. 8. 10.

바. 지체상금 부과내역

(단위: 원)

계약금액	지체일수	지체상금률	지체상금	비고
156,925,000	22일	0.05%	1,726,170

사. 납부방법: 세입고지서에 의거 은행 납부

************************

***********************************************

자. 세입과목: 세외수입, 임시적세외수입, 기타수입, 위약금및지체상금.  끝.

주무관	김호영		재무팀장	김주연		공원운영과장	류기혁		서부공원녹지사업소장	08/11
이용남
협조자
시행	공원운영과-27809	(	2022.08.11	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로, 243-60	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-300-5512	/전송	02-300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)