투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	5차 작업지시 작업기간 연장 승인 통보

1. 성동감리-31호(2022. 8. 11.) 및 제2022(성동)-17호(2022. 8. 10.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소와 귀 사간 계약 체결하여 진행중인 『도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(1권역)』과 관련하여 「2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)」작업지시(제 5차) 작업기간 연장 승인 요청사항에 대하여 아래와 같이 통보합니다.

가. 작업기간 연장요청 내용

1) 작업기간 연장사유: 광진구청에서 측구정비 후 중규모포장 계획있으나 구청에 측구

공사 지연으로 인하여 불가피하게 작업기간 연장 필요

2) 작업기간 연장 내용 및 책임건설사업관리기술자 검토의견

구분	작업구간	작 업 기 간		책임건설사업관리기술자 검토의견
		당초	변경
작업지시 (5차)	자양로 167~147 (L=211m)	2022.06.13. ~ 2022.08.13.	2022.06.13. ~ 2022.08.31.	자양로 167~147구간은 당초 8. 13일까지 완료 예정이였으나, 광진구청(도로과)에서 측구정비공사 미완료로 인하여 부득이하게 작업기간 연장이 필요 함.

나. 통보내용

- 건설사업관리책임기술자 검토의견 및 관련규정 등 제반사항에 대하여 검토한 결과, 현재 작업이 완료되지 않은 구간은 계약상대자〔매일엔지니어링(주)〕귀책사유가 없다고 판단되어 작업기간 연장 승인요청건에 대하여 승인통보하오니 변경된 작업기간내  작업을 완료하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	케이에스엠기술(주) 책임건설사업관리기술자, (주)매일엔지너일 대표, 매일엔지니어링(주) 대표
주무관	김영봉		도로보수과장	08/11
엄기영
협조자
시행	도로보수과-23685	(	2022.08.11	)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41, 성동도로사업소 도로보수과 (용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/	kaki100@seoul.go.kr	/	부분공개(6)