등록번호	생활안전담당관-10694		★주무관		CCTV관리팀장		생활안전담당관		부구청장
등록일자	2022.8.10.
			최광호		류상규		강계숙		08/11 김정호
결재일자	2022.8.11.
공개구분	부분공개(5)
			협조	동행정지원팀장		김유정
				공공디자인팀장		주철종
				도시재생팀장		김경민
				정보통신팀장		안용래
2022년 CCTV 통합구매 및 설치 계획(2차)
생활안전담당관

2022년 CCTV 통합구매 및 설치 계획(2차)

‘

각종 사건 사고로부터 우리구민을 안전하게 지키기 위해 관내 생활 방범, 불법주정차 지역, 공원에 CCTV를 신설하고, CCTV LED   안내판을 설치하여 범죄를 예방하고 안전한 도시환경을 구축하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ CCTV 통합안전관제센터 운영계획(2012.02.03.)

□ LED 안내판 사업계획(생활안전담당관-9241, 2022.7.13.)

□ 건축과 CCTV 발주의뢰(건축과-16258, 2022.7.18.)

□ 주택과 CCTV 발주의뢰(주택과-15914, 2022.7.25.)

□ 동정부과 CCTV 발주의뢰(동정부과-6800, 2022.7.29.)

Ⅱ		추진방향

□ 각 부서에서 요구하는 기능 및 설치장소 등을 고려하여 CCTV 설치

○ 우범 및 안전취약지역을 고려하여 설치위치 선정(중부 ‧ 남대문 경찰서 협조)

○ 관계부서 담당자와 합동으로 현장을 점검하여 최적지 선정

□ 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 규정 준수

□ 중복되거나 유사한 구매절차 간소화, 예산·업무의 효율적 활용을 위해 각 부서의 예산을 통합하여 사업추진

□ 안전·안심 거리 조성을 위한 CCTV LED 안내판 설치

Ⅲ		운영현황

□ 목적별 운영현황

[단위:대, 기준:2022.8.1.]

구 분	방범 (스쿨존)	공원	학교내	쓰레기 단 속	저류조	주정차단속	문화재
수 량	1,648(76)	201	149	62	10	315(8)	62
목 적	범죄예방, 적발, 수사	시설감시, 범죄예방	시설감시, 폭력예방	무단투기예방, 적발	재난관리 수해예방	불법주정차 예방, 적발	화재예방, 외부출입통제
관제장소	통합안전센터			주민센터, 통합안전센터	재난종합상황실(5층)	주차관리과	문화관광과 현장관리소
관제시간	24시간			필요시, 24시간	수해 등 예보시	주차:09시~21시 방범:21시~09시	24시간
관제인력	8명 (무기계약직 6명, 시간선택제임기제 2명)			동별청소담당 센터요원	호우대비담당 (필요시)	무인자동단속 (주차관리과 고지서발급)	10명 (문화관광과 시간제채용)
CCTV 주관부서	동정부과 (교통행정과)	공원 녹지과	학 교	청소행정과	치수과	주차관리과	문화관광과
CCTV설치 장소선정 방법	경찰서 협의	공원 녹지과	학 교	동주민센터 (민원발생장소)	치수과	주차관리과 (심의위원회개최)	문화 관광과와 문화재청

※ 영상저장은 30일 보관

Ⅳ		추진계획

□ 사업기간 : 2022. 9월 ~ 12월 (80일)

□ 사업내용

방범용 CCTV		LED 안내판
신설	이설		비상벨 LED	CCTV 안내판 LED
44대(16개소)	3대(1개소)		62대(62개소)	62대(62개소)

○ 민원발생지역, 취약지역에 CCTV 신설 : 총 16개소, 카메라 44대 신설

- 방범: 16개소 44대(회전형 9대, 고정형 35대)

○ 방범용 1개소 이전 설치

- 서울역 GTX(수도권 광역급행철도) 공사로 인해 관리번호 남204

CCTV를 퇴계로36나길 19-10으로 이전설치(회전형 1대, 고정형 2대)

○ CCTV 관제프로그램(S/W) 구매 : 방범용 44본

○ CCTV 관제시스템(H/W) 증설 : 스토리지 48TB

○ CCTV LED 안내판 62대, 비상벨 LED 안내판 62대 설치

- 기존 아크릴 안내판을 LED 안내판으로 교체 설치

□ 계약방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 낙찰자 결정방법 : 협상에 의한 낙찰자 결정

○ 계약근거  : 제한경쟁/금액:257,400,000원

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에

의한 계약체결) 및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(제5장 협상에 의한 계약체결기준,

행정안전부 예규 제175호, 2021.9.6.)

□ 참가자격

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여

국가종합전자조달시스템(나라장터)에 영상감시장치(세부품명번호 10자

리 4617162201)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호

및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업

범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인

확인서를 소지한 자

○ 공고일 기준 『정보통신공사업법』 제14조에 의한 정보통신공사업

등록업체

○ 입찰공고일 전일을 기준으로 주된 영업장 소재지가 서울시인 업체

□ 소요예산: 257,400천원(도로복구비/한전수전비 제외, 부과세 포함)

(단위 : 천원)

구 분	합계	생활안전담당관	동정부과	건축과	주택과
합 계	257,400	78,400	125,000	18,000	36,000
국 비	0	0	0	0	0
시 비	208,900	76,500	100,000	0	32,400
구 비	48,500	1,900	25,000	18,000	3,600

○ 예산과목

동정부과	- 동행정내실화, 동행정 내실화, 동행정 강화, 지능형 CCTV 고도화사업, 자산취득비, 자산및물품취득비
생활안전 담당관	- 생활안전담당관, CCTV 안전서비스 확대, CCTV 구축 및 관리, CCTV 통합안전센터 운영, 시설비및부대비, 시설비 - 생활안전담당관, CCTV 안전서비스 확대, CCTV 구축 및 관리, CCTV 통합안전센터 운영, 일반운영비, 공공운영비
주택과	- 주택과, 도시재생, 도시재생, 동화동골목길재생사업,시설비및부대비,시설비
건축과	- 건축과, 공공디자인 행정 활성화, 명품 도시환경 구축, 황학동 가구거리 경관개선, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 사업 추진 흐름도

예산편성, 위치선정, 주민동의, 발주의뢰, 관계자 의견수렴 (행정 예고 등)	⇨	시방서/설계서 작성, 사업 발주, 한전 수전/공가 신청, 구축감독, 준공검사, 유지관리
주관 부서		생활안전담당관

Ⅴ		추진일정

□ 일상감사 및 계약심사 의뢰          : ‘22. 8월

□ 사업발주, 입찰공고, 제안서 접수        : ‘22. 8월 ~ 9월

□ 제안서평가위원회 개최 및 계약체결     : ‘22. 9월

□ CCTV설치                              : ‘22. 9월 ~ 12월

□ 서비스 개시                           : ‘22. 12월

Ⅵ		행정사항

□ 동정부과, 주택과, 건축과

○ CCTV 위치선정 및 행정예고 시행

□ 홍보전산과 : CCTV 자가망 공사시 작업 협조

붙임 1. 동정부과 CCTV 발주 의뢰서 1부.

2. 건축과 CCTV 발주 의뢰서 1부.

3. 주택과 CCTV 발주 의뢰서 1부.

4. LED 안내판 사업계획서 1부.

5. 설계내역서 1부.

6. 제안요청서 1부.  끝.