문서번호	원수관리과-21168
결재일자	2022. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
정정재		김종필	08/11
			代정종철
협조

물품 구매·설치 계약기한 연장 검토보고

(강북통합취수장 염소투입설비 제조·구매설치)

2022. 08.

강북아리수정수센터

〔원수관리과〕

			물품 구매·설치 계약기한 연장 검토보고 - 강북통합취수장 염소투입설비 제조·구매설치 -

우리 센터 “강북통합취수장 염소투입설비 제조·구매 설치” 계약 연장 신청이 접수되어 아래와 같이 검토 및 조치 계획을 보고드림.

□ 신청개요

○ 접수일자 : 2022. 8. 10.

○ 신 청 자 : ㈜태현이엔지 (부산광역시 사하구 감천항로 221-9(구평동))

○ 접수번호 : 원수관리과 –21165(2022. 8. 10.)호 “「납품기한 연기요청」

○ 주요내용 : 취수장 염소투입설비 제조·구매 설치 사업 계약기간 연장

○ 신청사유

① 코로나19, 러시아 우크라이나 전쟁 등 국제 경영환경 변화에 따른 반도체 수급 어려움으로 납품 기자재의 외산 부품인 염소기화기의 PCB 및 염소투입기 콘트롤러 제조업체(에브쿠아(미) / 웰어스 엔 티아나)로부터 물품 공급 연기를 계약업체에 요청

② 또한, 최근 탄탈륨 등 염소용 원자재의 가격폭등 및 수급 불안정으로 자재 납품 지연 발생

③ 연장요청 기한

당초계약	변경계약(안)	비고
2022. 4. 11. ~ 2022. 9. 7.	2022. 4. 11. ~ 2022. 11.30.	1차

□ 사업의 개요

○ 사 업 명 : 강북통합취수장 염소투입설비 제조 구매·설치

○ 계약업체 : ㈜태현이엔지

○ 계약금액 : 금514,620,020원(금오억일천사백육십이만이십원)

○ 계약일자 : 2022. 4. 11.

○ 착수일자 : 2022. 4. 14.

○ 납품기한 : 2022. 9.  7.

○ 사업내용 : 염소기화기(1대), 염소투입기(1대) 인젝터(5대), 자동 절체밸브(4식), 가스누설감지기(13대) 외 기타 부속설비 제조 구매·설치

□ 검토결과

○ 코로나19, 러시아 우크라이나 전쟁 등 국제 경영환경 변화에 따른 반도체 수급 어려움으로 염소기화기의 PCB 및 염소투입기 콘트롤러 물품 수급의 어려움이 확인되고,

○ 또한, 최근 탄탈륨 등 염소용 원자재의 가격폭등 및 수급 불안정으로 자재 납품 지연 발생이 물품 공급업체 제조사 현지 사정에 따른 문제로 계약 상대자(태현이엔지) 책임이 아닌 것으로 판단되므로,

○ 계약 상대자의 계약기한 연장을 승인하는 것이 타당하다고 사료 됨.

◉ 관련근거: 「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」제15장 물품계약일반조건 제7절(계약기간의 연장) 제1조 다목 –1) - 나)·라)

○ 계약상대자의 책임 없이 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다(천재·지변 등 불가항력의 사유)

-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병

- 그 밖에 계약상대자의 통제범위를 벗어난 사유로서 행정안전부장관이 정하여 고시하는 사유

□ 조치계획

○ 사업 중 일부 품목(기화기, 투입기)의 공급업체에서 납품 일정이 지연 됨에 따른 사업의 일정을 조정하여 추진

- 당초 사업기간이 2022. 4. 11.부터 9. 7.까지나 계약기한 연장을 승인 2022. 4. 11.부터 11. 30.까지 계약을 연장 사업 완료에 만전을 기하고자 함.

붙임  준공(납품)기한 연기 의뢰서 1부.  끝.