문서번호	건축부-27924
결재일자	2022. 8. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김완선		代손남기	08/12
			신명승
협 조
	주무관			정상진

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」

총차 및 2차 계약변경(공사기간 연장) 검토보고

2022. 8.

도시기반시설본부

[ 건 축 부 ]

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」

총차 및 2차 계약변경(공사기간 연장) 검토보고

본 공사의 품질 및 안전성 확보를 위하여 건설사업관리단으로부터 공정표 변경 및 공사기간 연장(총차 및 2차) 요청보고가 제출되어 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사(장기2차)

○ 위    치 : 서울시 성동구 아차산로17길 9 (성수동2가 277-34)

○ 규    모 : 지하2층~지상7층, 연면적 2,711.51㎡

○ 공사기간 : 2020. 6. 30. ~ 2022. 9. 6.

○ 공 사 비 : *******************

○ 시 공 사 : 세이브건설㈜, 이레비앤디㈜, ㈜블루트리이엔지

○ 감 리 사 : ㈜포스코에이앤씨건축사사무소, ㈜비전이엔지기술사사무소

○ 차수별 계약현황

구 분	도급금액 (원/VAT포함)	계 약 기 간	비 고
총 차	*************	*************************
1 차	*************	*************************	준 공
2 차	*************	*************************	금 차

2		추 진 경 위

○‘20. 06. 30. : 공사 착공

○‘21. 06. 30. : ****************************

○‘21. 08. 13. : ****************************

○‘21. 09. 06. : 1차수 준공

○‘21. 09. 07. : 2차수 착수

○‘22. 03. 17. : ****************************

3		공사기간 연장 검토

○ 관련 규정 및 근거

-「공사계약 일반조건」제26조(계약기간의 연장)

- *******************************************

○ 공사기간 조정 (※ 계약금액 변경없음)

구 분	공사기간		증·감
	변경 전	변경 후
총차	**********************	************************	******
2차	*********************	***********************	******

○ 공사기간 조정 사유

1. **************************************

가. ************************************************

나.********************************************************

※「공사계약일반조건」제25조 제3항 제6호에 따라, 설계변경으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없는 경우

2. ******************************************

※「공사계약일반조건」제25조 제3항 제8호에 따라, 원자재의 수급 불균형으로 인하여 관급자재의 조달지연의 구입곤란의 사유로 공기 지체된 경우

○ 연장사유 귀책소재 : 해당없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		건설사업관리단 검토의견

○ *************************************** *************************************

○ ***********************************  ************************

5		처 리 의 견

○ ***************************************************************************

○ ***************************************************

붙 임  1. 공사기간 연장 요청(건설사업관리단 공문) 1부.             2. 당초 예정공정표. 1부.                                    3. 변경 예정공정표. 1부.  끝.