문서번호	영동대로복합개발추진단-24229
결재일자	2022. 8. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	복합개발건축과장		영동대로복합개발추진단장		도시철도국장		도시기반시설본부장
김연홍	代김연홍		이승석		代정대현		08/16
							代권완택
협 조
	복합개발설비과장					곽용길
	주무관					이시정
	전문관					박규영
	주무관					김두환
	주무관					박갑임

	『 영동대로 지하공간 복합개발 』 건축·시스템분야 건설공사 발주계획

2022.08

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『 영동대로 지하공간 복합개발 』

건축·시스템분야 건설공사 발주계획

	영동대로 지하공간 복합개발사업」2개 공구(건축·시스템 분야) 건설공사에 대한 발주 계획을 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 코엑스 사거리(9호선 봉은사역) ~ 삼성역(2호선 삼성역)

○ 규    모 : 복합환승센터(지상1층 ~ 지하5층, 시설면적 : 212,074.45㎡)

○ 공사기간 및 기술제안 기간

*************************************

***************************************

********************************

*****************

**************************

구 분	합 계	1공구	2공구
****		******************** ************	*********************************
*****	***********	***********	***********
*****	*******	*******	*******
**** ********		**********	**********

****************************************************

Ⅱ		추진경위

○ '16.05.26. : 강남권 광역 복합환승센터 기본구상 수립(시장방침 제139호)

○ '16.10.31. : 영동대로 통합개발 MOU 체결(서울시, 국토부)

○ '17.08.10. : 강남권 광역복합환승센터 기본계획 수립(시장방침 제171호)

- 사업 추진방식 : 기본설계 기술제안입찰

○ '18.01.23. : 서울시 투자심사 완료(재정관리담당관)

○ '18.01.25. : 지방재정 타당성조사(LIMAC)

○ '18.02.28. : 기본설계용역 수행

○ '18.04.04. : 중앙 투자심사 완료(행정안전부)

○ '19.05.28. : 경제성 설계(VE) 완료(토목·건축분야)

○ '19.06.10. : 강남권 광역 복합환승센터 지정 승인(국토부 대도시광역교통위원회)

○ '19.11.04. : 경제성 설계(VE) 완료(설비분야)

○ '19.11.26. : 공구 분할계획 수립

- 공사규모, 공정관리 등을 고려 2개 공구 분할

○ '19.12.18. : 건설기술심의(입찰방법)

○ '20.5.~ 9. : 건설기술심의(설계, 공사기간 적정성, 입찰안내서)

○ '20.11.19. : 계약심의(수정의결)

- 계약체결방법 : 단독, 공동이행, 분담, 혼합방식 모두 허용

○ '21.03.04. : 중앙 투자심사 재심사(조건부 추진)

- 라이트빔, 공공시설 축소 등 사업비 절감방안 마련, 실시설계 후 2단계 심사

○ '21.10.05. : 사업계획(규모) 변경 추진계획(시장 방침 제61호)

○ '21.10.15 : 사업계획(규모) 영동대로 지하공간 복합개발사업 사업계획 변경에 다른 설계·공사 실행계획

○ '21.11.11. : 사업게획(규모) 변경에 따른 재설계 추진계획 보고

○ '22.06.22. : 건설기술심의(기본설계)

○ '22.07.08. : 건설기술심의(공사기간 적정성)

○ '22.07.27. : 건설기술심의(입찰안내서)

Ⅲ		발주계획

□ 계약 및 입찰방법

**************************

***************************************************************************************************************

**********************

**********************************

□ 입찰 참가자격〔'20.11.19 계약심의위원회 심의 완료〕

○ 참가자격 : ***************

<시 공>

******

******************************************************

************************************

****************************

********************************

******

*****************************************************

*****************************

****************************

********************************

**********************************

<설 계>

*****

************************************

**************************************************************************************

*****************************

************************************************

*****************************************************

******************************

******

**************************************

*************************************************

****************************************

*****************************

************************************************

****************************************************

*****************************

*************************************************

**********************

○ 실적제한 : **********************

**********************************************************************************************************************************************************************************

□ 공동수급체 구성〔'20.11.19 계약심의위원회 심의 완료〕

○ 공동수급체 구성

*******************************************************

***************************************************

********************************

※ 대표자는 입찰 참가자격이 있는 자로써 건축공사업(또는 토목건축공사업) 등

록업체 중에서 출자 비율이 많은 자이어야함

********************************

********************************************************

****************************************************

*************************************************

□ 기술제안 방법 〔'22.7.27 건설기술심의(입찰안내서) 심의완료〕

*********

*****************************************************

*************************************************

*******************************

********************************************

**************************************************

**************************************************

******************************

Ⅳ		향후 추진계획

○ ‘22.08월 : 일상감사 의뢰

○ ‘22.08월 : 건설공사(1,2공구)조달청 입찰 의뢰 및 공고

○ ‘22.09월 : 입찰참가자격 사전심사(PQ), 현장설명회

○ ‘23.02월 : 기술제안서 평가

붙임 : 기본설계 기술제안입찰 추진절차도 1부. 끝.