투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	월드컵대교 건설공사 삼성물산(주)
(경유)
제목	추가투입 비용의 계약금액 조정신청에 대한 회신(월드컵대교 건설공사)

1. 삼건(월드컵)2022-546호(2022.7.21.)와 관련입니다.

2. 우리 본부와 도급계약 체결되어 사업추진 중인 「월드컵대교 건설공사」에 대해 **************************************에 대한 계약금액 조정 신청 건에 대해 아래와 같이 회신하니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 우리 본부는 귀 사와 최초 계약체결 후 현재까지 관련법에 의한 산업안전보건관리비를 계상하여 계약체결 하였고 사용한 금액에 대해서도 관련 근거에 의거 정산 처리하고 있는 실정이며,

나. 이와 관련하여 ******************************************************* 검토한바, 귀 사가 첨부한 질의회신에도 나와 있듯이 초과 사용한 안전관리비에 대해서 규정상 강제하고 있지 않아 설계 계상 및 계약금액 조정 대상에 해당되지 않는 것으로 판단되어 계약금액조정 신청을 받아들일 수 없음.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조동협		토목총괄과장	김태중		토목부장	08/16
代김태중
협조자	주무관	조재근
시행	토목부-28757	(	2022.08.16	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2543	/전송	02-3708-2599	/	yerom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)