유적전시관 통신공사 실정보고 검토서

공사명

남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 통신공사

공사개요

· 위 치 : 서울 중구 회현동1가 100-177

· 공사기간 : '19.3.26~'22.9.20.

·*********************

· 시공사 : ********

· 감리단 : ******

· 설계사 : ********

실정보고 건명

재설계에 따른 통신공사 실정보고

실정보고

사유

전시관리실에 재설계에 따른 변경계약을 추진하기 위함

건설사업관리단

검토의견

감리업무 세부 과업지침에 의한 적정성 검토한 결과 적합함

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	지하1층	실구획, 위치변경에 따른 물량 변동	물량 증가 및 보험료 정산 등
금액	************	************	***********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

설계변경 계약 추진

발주처

검토의견

재설계 도면 검토결과 물량산출 적정하고 증감물량은 계약단가적용, 신규물량은 조사단가에 낙착율 적용하여 원안대로 설계변경 계약을 추진하고자 함.

붙임

1.설계변경 실정보고 및 기술검토서 각 1부

2.시공사 실정보고서 1부

3.설계변경 내역서 1부.

4.합의각서 1부

결재

주무관

이성산

도성관리팀장

이원재

한양도성도감과장

08/17

김홍진