문서번호	문화시설과-23769
결재일자	2022. 8. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	문화시설2팀장	문화시설과장
이덕노	신동헌	08/17
		정한호

서울연극센터 리모델링 추가공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8

문 화 시 설 과

( 문 화 본 부 )

서울연극센터 리모델링 추가공사 계획

서울연극센터 리모델링 사업과 관련하여 『설계의도구현 업무』를수행하고 있는 설계자 및 문화예술과로 부터 공사마감과 관련하여, 추가 공사가 필요 하다는 의견을 반영 공사을 실시 하고자 함.

Ⅰ		공사 목적

○ 서울연극센터 운영(‘23.11월)에 필요한 마감공사를 실시

하여 연극센터를 방문하는 연극인 및 시민들에게 안전 및

쾌적한 환경을 조성코자 함.

Ⅱ		추진일정

○ ’18. 11. 27.	연극센터 리모델링 추진 기본계획 수립
○ ’19. 7.~9.	설계공모(지명현상설계)당선작: 신 건축사사무소(신호섭)

○ ’21. 1.~’21. 3.	공사착공 및 기존건물 해체(도시기반시설본부 건축부)
○ ’21. 4.~5.	기초판(팽이기초) 공사 및 감리단 계약 (주)펨코엔지니어링
○ ’21. 7.~12.	4층~지붕층 골조공사 진행중(공정율 50%)
○ ’22. 1.~5.	외부창호 설치 및 내외부 및 토목공사(공정율 95%)

○ ’22. 5.03	설계자(신건축사) “설계의도구현” 업무진행 추가공사요구

○ ’22. 5.13	도기본(건축부-23105호) “공기연장 추가공사 불가” 통보

○ ’22. 6.~	준공처리(6.10) 및 일부 하자부분 보수(누수및1층바닥)
○ ’22. 8.12	서울연극센터 공사관련 시설보완요청”(문화예술과-26428)

Ⅲ		공사 개요

○ 공 사 명 : 서울연극센터 리모델링 추가공사

○ 위     치 : 종로구 명륜동4가 1번지            〔첨부1〕현장사진

○ 추가공사 내역                                  〔첨부2〕건축도면

- 지상1층 천장(약 178㎡) 및 벽면(2면) 도장 공사

- 지상2층 아카데미룸, 지상3층 화이트박스 천장 도장 공사

- 지상1,2,3층 공용부천장 및 계단하부 면 노출콘크리트 도장

- 지상2,3층 복도 난간 설치(Thk12강화,유리길이:2.4m,H=1.2m)

○ ****************************************

○ 공사 기간 : 2022. 8. 25 ~  9. 06 (약 10일간)

Ⅳ		소요 예산

○ 예산과목 : 문화시설과, 문화도시 기반조성, 문화예술시설건립,   서울연극센터 리모델링 시설비(401-01)

○ ********************              〔첨부3〕공사비 견적서

*********************

********************

********************

*************************

********************

******************

*********************

Ⅴ		공사발주계획

○ 공사업체 :*******************

***************************************

*********************

○ 계약방법 : 수의계약 (관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항 및 같은 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 마목, 제30조 제1항 제2호 가 )

○ 하자보증기간

- 지방계약법 시행규칙 제68조 [별표1](공사의 종류별 하자담보책임기간)에 의함

Ⅵ		향후 계획

○ ‘22. 8. 19 : 계약의뢰

○ ‘22. 8. 25 ~  9. 06 공사실시 (약 10일간)

첨 부  1) 현장사진 1부

2) 건축도면 1부.

3) 공사비 견적서 1부.

4) 시 방 서 1부. 끝.