문서번호	전시과-23134
결재일자	2022. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		전시과장
신지혜		08/17
		이현배
협 조

「2022년 서울시립과학관 이동형 과학체험 전시물 제작」

사업기간 연장 검토보고

2022. 08.

서울시립과학관

(전   시   과)

「2022년 서울시립과학관 이동형 과학체험 전시물 제작」

사업기간 연장 검토보고

2022년 지역과학관 활성화 지원 사업의 원활한 추진을 위하여 사업일정 변경에 대한 검토 내용을 보고 드림

□ 관련근거

○ 2022년 지역과학관 활성화 지원 사업 전시콘텐츠 개발 사업 추진 일정 검토 보고 및 협약기간 내 완수 요청의 건(한과협-2168, 2022.07.27.)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 서울시립과학관 이동형 과학체험 전시물 제작

○ 사업내용 : 이동형 과학체험 전시물 7종 제작

○ 계약금액 : 금219,020천원(발주금액: 금233,000천원)

- 사업예산은 (사)한국과학관협회가 진행한「2022년 지역과학관 활성화 지원 ‘전시 콘텐츠 개발지원기관’공보사업」선정으로 예산 전액 지원

○ 사업기간 : 계약일로부터 2022. 10. 31. 이내

○ 위    치 : 서울시립과학관 내

○ 계약업체 : 주식회사 전시문화 피움

□ 추진경과

○ 선정안내                       : 2022. 4. 19.

○ 착수보고                       : 2022. 4. 25.

○ 사업등록(e나라도움)            : 2022. 5. 4.

○ 사업비 교부(e나라도움)           : 2022. 5. 11.

○ 사업 추진계획 수립              : 2022. 5. 23.

○ 사업추진계획 변경 및 계약 의뢰 : 2022. 6. 9.

○ 사전규격 공고(5일)            : 2022. 6. 14. ~ 6.19.

○ 본 공고(긴급공고 10일)        : 2022. 7. 5.

○ 제안서평가위원회 개최          : 2022. 7. 27.

○ 계약체결                       : 2022. 8. 5.

○ 사업착수                       : 2022. 8. 10.

□ 검토사항

○ 검토결과 : ‘2022년 서울시립과학관 이동형 과학체험 전시물 제작’사업의  협약기간 연장 (당초 2022.9.30. → 변경 2022.11.7.)

○ 검토사유

- 서울시 자체 회계시스템(e호조)이 아닌 국고보조금통합관리시스템(e나라도움) 회계시스템 사용 따라 행정절차 변경 및 서울지방조달청 사전 행정처리 지연에 따른 과업 착수 시점 순연 및 절대적인 과업수행 기간 부족 상황 발생

○ 검토내용

- 본 사업은 고도의 창의성을 필요로 하는(과학 전시물을 ‘제작구매’ 하는)사업으로 완성도 높은 전시물 제작을 통해 소기의 목적 달성을 위해서는 그간의 경험측상 100일 이상의 과업기간이 필요함

- 그러나, 사업선정 후 서울시립과학관-과기부-한국과학관협회 착수보고(4.25.)이후 사업추진 과정에서 ‘서울지방조달청의 사정’(“협상에 의한 계약”방식으로 계약을 준비하였으나 한시적으로 해당 계약방식은 중단, “규격가격동시입찰”방식으로 사업 변경 추진)에 따른 업무 지연, 서울시립과학관-한국과학관협회 간 사업 일정 조율 및 검토 등으로 사전 행정절차 지연 등으로 발주 및 과업의 착수가 순연됨

- 이에 사업일정의 단축을 위해 공고기간 단축(긴급공고 기간 10일), 검수 및 대가 지급기간 단축(15일→7일) 등의 노력을 하더라도 당초 협약기간(9월30일 까지)은 과업을 수행하기에 절대적으로 부족함

- 따라서 완성도 높은 양질의 전시물 제작을 위해 과업 수행기간을 변경하여 추진하는 것이 타당함

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약 금액	219,020,000원	219,020,000원	변경없음
과업 기간	계약일로 부터 2022년 9월 30일 까지	계약일로 부터 2022년 10월 31일 까지	증 31일
협약 기간	2022년 9월 30일 까지	2022년 11월 7일	증 38일

□ 향후계획

○ `22.08. 20.     : 공모안 보완 (콘텐츠 자문 및 설계보완)

○ `22.08. 30.     : 최종설계 보고 및 설계도서 납품(실시설계 완료)

○ `22.09.~        : 전시물 제작

○ `22.09.15.~    : 낙찰차액 활용 (이동전시 운영물품 구매)

○ `22.10. 31.    : 전시물 제작 완료 (검수 및 납품 완료)

○ `22.11. 7.限     : 대가 지급

- 지방계약법 제17조~19조, 지방계약법 시행령 제64조~68조에 따라 검사는 사업완료 후 14일 이내 완료하고 대가 지급은 이후 5일 이내에 완료 해야하나 본사업과 연계된 향후 사업추진(전시물 순회전시)일정에 따라 최소한의 일정으로 검수 및 대가 지급을 진행할 예정.  끝.