문서번호	도시철도토목부-25835
결재일자	2022. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		代김윤수	08/17
			최병훈
협 조
	주무관			김봉성

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」  건설사업관리용역 설계변경 검토 보고(총괄5회, 4차1회)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

건설사업관리용역 설계변경 검토 보고(총괄5회, 4차1회)

2022.  8.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

건설사업관리용역 설계변경 검토 보고(총괄5회, 4차1회)

도시철도토목부장 : 최병훈☎772-7040 토목2과장 : 권순환☎7042 담당 : 장대성☎7222

건설사업관리단으로부터 제출된 “물가변동(K3)으로 인한 계약금액 조정” 건에 대한 검토보고 임.

※ 관련서류 : 동기공 제2022-4390호(’22.08.12)

□ 관련근거

ㅇ 지방계약법 시행령 제73조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ 용역계약 일반조건 제6절, 2.물가변동으로 인한 계약금액의 조정

ㅇ 진접선1공구 건설사업관리용역 과업내용서 6.2 물가변동

□ 용역개요

ㅇ 계 약 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 계 약 자 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 4개사

ㅇ 계약기간 : ’18.12.1.~ ’24.10.31. (4차 : ’22. 2. 3. ~ ’22.12.31.)

ㅇ 계약금액 : 4,635,495,000원 (4차 : 724,000,000원)

ㅇ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	기준공 (1차~3차)	금 회 (4차)	장 래
용 역 비	4,635,495	1,854,700	724,000	2,056,795
용역기간	’18.12.01 ~ ’24.10.31	’18.12.01 ~ ’22.02.02	’22.02.03 ~ ’22.12.31

□ 추진경위

ㅇ ’18.10.12. : 계약체결

ㅇ ’19.12.31. : 1차 용역 준공

ㅇ ’20.12.07. : 총괄1회 변경(물가변동 7.58%)

ㅇ ’20.12.31. : 2차 용역 준공

ㅇ ’21.11.15. : 총괄2회 변경(물가변동 3.43%)

ㅇ ’21.12.15. : 총괄3회 변경(안전감리원 추가투입)

ㅇ ’22.01.25. : 총괄4회 변경(감리원 투입계획 변경)

ㅇ ’22.02.02. : 3차 용역 준공

□ 건설사업관리용역사업자 보고내용

ㅇ 변경사유

- 조달청 물가변동(K3) 검토결과 반영 : 조정율 3.53%

ㅇ 변경 현황

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총괄5회	계 약 금 액	*********	*********	**	******	********
	계 약 기 간	*******************	*******************	*		******
	투 입 인 원	*********	*********	*		******
4차1회	계 약 금 액	*******	*******	**	******	********
	계 약 기 간	*******************	*******************	*		******
	투 입 인 원	********	********	*		******

ㅇ 검토의견

- 물가변동(3회 E/S)으로 인한 계약금액 조정 요건이 발생함에 따라 물가변동 조정금액을 계약금액에 반영코자 함.

※ 총괄5회는 계약기간 및 투입계획 변경없이 물가변동금액************을 반영한 계약금액 조정, 4차1회는 계약기간 변경 없이 물가변동에 의한 계약금액 조정************ 반영

□ 조치의견

ㅇ 건설사업관리용역사업자의 계약금액 변경요청이 적정한 것으로 판단 되므로 다음과 같이 설계변경(총괄5회, 4차1회) 시행코져 함.

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총괄5회	계 약 금 액	*********	*********	**	******	********
	계 약 기 간	*******************	*******************	*		******
4차1회	계 약 금 액	*******	*******	**	******	********
	계 약 기 간	*******************	*******************	*		******

붙 임 : 1)조달청 검토의견서 1부.

2)건설사업관리용역사업자 공문 1부.

3)변경내역서(총괄5회, 4차1회) 1부.

4)합의각서 1부.  끝.