문서번호	도시철도계획부-24492
결재일자	2022. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	경전철설계과장	도시철도계획부장
유용규	박범진	08/17
		정대현

위례선 소규모 재해영향평가 용역

준공기한 연기 검토 보고

2022. 8.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

위례선 소규모재해영향평가용역

준공기한 연기 검토 보고

위례선 도시철도 건설공사의 「소규모 재해영향평가 용역」에 대한 준공 기한 연기 검토결과를 보고드림

□ 용역개요

ㅇ 위    치 : 마천역(5호선) ~ 복정역(8호선) 및 남위례역(8호선)

ㅇ 규     모 : 연장 5.4㎞, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

ㅇ 용 역 비 : 37,341천원

ㅇ 용역기간 : 2021. 10. 19. ~ 2022. 8. 18.

ㅇ 용 역 사 : ㈜도시미래종합기술공사

□ 추진경위

ㅇ	'21. 5.	:	위례선 도시철도 건설사업 입찰공고
ㅇ	'21.10.	:	소규모 재해영향가 계약 및 착수
ㅇ	'22. 5.	:	재해영향성 사전검토 요청(본부→대광위)
ㅇ	'22. 8. 현재	:	재해영향성 사전검토 보완 제출(본부→대광위)

□ 준공기한 연기

ㅇ 연기사유

- 국립재난안전연구원의 사전 검토의견 보완 중 LH(위례신도시 우수계획 자료 부재) 자료제공 지연으로 보고서 작성에 추가기일 소요.

- 관계기관(국립재난안전연구원, 대광위, 행정안전부) 협의 시 검토기간 증가로 본 과업의 절대공기 부족에 따른 준공기한 연기 필요.

ㅇ 연기 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

ㅇ 용역기간 변경

구 분	당초	변경	비고
용역기간	2021. 10. 19. ~ 2022. 8.18.	2021. 10. 19. ~ 2022. 11.30.	증) 107일

※ 계약금액 변동 없음

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 준공기한을 연기 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 함.

****************

********************

*********************