문서번호	인력개발과-29011
결재일자	2022. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	후생팀장	인력개발과장
박준우	최민수	08/18
		공병엽

서천연수원 외부 목재데크 개선공사 추진 계획

서천연수원 외부 목재데크 개선공사 추진 계획

2022. 8.

인력개발과

(후생팀)

서천연수원 외부 목재데크 개선공사 추진 계획

서천연수원 내 노후화된 외부 목재데크를 적기에 개선하여 안전사고를 미연에 방지하고자 함

□ 추진경위

ㅇ 2022년 연수원 해빙기 안전점검 결과 전문가 지적사항(‘22.3.14.)

*******************************

ㅇ 서천연수원 조경분야 개선 점검 결과 지적사항(‘22.4.20.)

*************************************

그림 부패되어 파손된 난간대	그림 하부 H형강 녹 발생
그림 야외무대 목재데크 노후화	그림 노을관 앞 목재 울타리 노후화

□ 설계도면

****************************************************

□ 발주계획

ㅇ 공 사 명 : 서천연수원 외부 목재데크 개선 공사

ㅇ 규    모 : 외부 목재데크 철거 및 신규 설치

- ****************

- *******************

- *****************

- *************

ㅇ 소요예산 : *************

- *************************************************

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 50일

ㅇ 입찰내용

- (공사) 공개경쟁입찰, (관급자재) 조달 구매

- 참가자격 : 충청남도 소재 조경시설물설치공사업 면허 보유업체

- 하자보증기간 : 2년

ㅇ 예산과목 : 인력개발과, 인적자원 역량강화, 수련원관리사업, 연수원 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 추진일정

ㅇ 시공자 입찰 공고 및 관급자재 구매	‘22.9.

ㅇ 공사 착수	‘22.9.

ㅇ 공사 완료	’22.10.

ㅇ 준공 및 정산	’22.11.

붙임  1. 설계도서 1부.  끝.