문서번호	전시과-23140
결재일자	2022. 8. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	08/18
			代고중석
협 조
	주무관			허용석
	주무관			양희원

-서울시립과학관 2022년 신규체험 전시물 제작 설치- 설계보고회 개최 결과보고

2022. 08.

서울시립과학관

(전   시   과)

- 서울시립과학관  2022년 신규체험 전시물 제작 설치 -

설계보고회 개최 결과보고

「서울시립과학관 2022년 신규체험 전시물 제작·설치」사업의 전시설계에 대한 최종보고회 개최결과를 보고드림

□ 추 진 근 거

○ -양질의 전시콘텐츠 확충과 과학전시 확산을 위한- 2022년 신규 체험전시물 제작·설치 추진계획(전시과-1479, 2022. 3. 16.)

○ 물품 계약체결 통보(서울시립과학관 2022년 신규 체험전심루 제작설치)(전시과-21339, 2022. 5. 26.)

□ 사 업 개 요

○ 계 약 명 : 서울시립과학관 2022년 신규 체험전시물 제작 설치

○ 계약금액 : 일금227,200,000원(일금이억이천칠백이십만원)

○ 계약일자 : 2022. 5. 23.(완수일자 : 2022. 10. 18.)

○ 계약업체 : 주식회사 전시과학

□ 설계보고회 개최개요

○ 일    시 : 2022. 8. 12.(금) 15:00~17:00

○ 장    소 : 서울시립과학관 회의실

○ 참 석 자 : 총 5명

- 과 학 관 : 이진원, 신지혜 주무관, 박윤실 실무관

- 계약업체 : 백상렬 부장, 노해원 차장

○ 주요 보고내용

- 과업 착수 후 총 3차례에 걸친 협의를 통해 도출한 전시 설계안 보고

• 전체적인 전시구성 및 전시실 내 평면·입면 배치 계획

• 개별 전시물에 대한 세부 연출계획 및 체험방법

※ 일부전시물의 경우, 연출 및 체험방법 조정(최종 확인 후 설계도서 납품)

- 전시물 설치·운영을 위한 기반시설(전기·통신·건축·설비 시설) 사용 협의

- 설계완료 및 전시 제작·설치 일정 등 과업추진 일정 보고 및 협의

□ 보고회 주요내용

○ 주요 전시구성 및 내용

순 번	전시물명	전 시 개 요	연 출 매 체
B1	라그라자트 섬의 일요일 오후 (조르주 쇠라)	청소기의 흡입관을 삼원색 중 하나의 센싱 위치에 두면 점묘화 속에서 선택한 색깔의 색 점이 흡입관 속으로 휩쓸려 들어가는 인터랙티브 미디어 아트 체험을 통해 색의 병치 혼합과 픽셀의 개념을 탐구하도록 한다.	작동모형, 미디어시스템,SW
B2	절 규 (에드바르트 뭉크)	스크린 속「절규」그림의 다리가 흔들리는 리듬에 맞춰서 체험자가 서있는 다리에 진동을 더하면 그림 속 다리의 출렁임이 커지는 현상을 통해 파동의 합성과 공진 현상에 대해 탐구하도록 한다	작동모형, 미디어시스템,SW
B3	월하정인(신윤복) 에트르타절벽의 일몰(클로드 모네)	인형뽑기 로봇팔 장치를 모티브로 「월하정인」그림 속의 달을 집어 올린 후 「에트르타 절벽의 일몰」 그림 속에 넣으면 일식이 진행되는 영상 시뮬레이션 체험을 통해 월식과 일식의 원리를 탐구하도록 한다.	작동모형, 미디어시스템,SW, 체험소품
B4	열린 창가에서 편지를 읽는 여인 (여하네스 베르메르)	X-ray촬영기와 대기공간을 모티브로 구성된 공간에서 X-ray촬영기의 디스플레이 장치를 통해 X선으로 조영된 장면 보며 「열린 창가에서 편지를 읽는 여인」작품 속 덧칠 전 그림의 비밀을 탐구하도록 한다.	작동장치, 미디어시스템,SW
B5	밤의 카페테라스 (빈센트 반고흐)	전원 차단기를 이용하여 「밤의 카페테라스」 그림 속 도시의 조명을 On/Off 조작하면서 광공해로 보이지 않던 밤하늘 별들의 풍경을 확인할 수 있도록 한다.	작동장치, 미디어시스템,SW
공통	전시환경 개선	전시공간을 카메라 컨셉의 독립적인 부스로 디자인하여 설치하고, 통합관리시스템으로 전시물 전원관리를 할 수 있게 시스템을 구축한다.	부대시설

○ 설계보고안에 대한 주요 조정요청 내용

- 전시공간을 카메라 컨셉의 독립적인 부스 디자인으로 설치하고 외관 재질은 철재, 가죽, 플라스틱 등 다양한 질감을 살려 입체적으로 설치 하고 외관의 실제의 카메라를 연상시킬 수 있는 디테일 요소를 살릴 수 있도록 함

- 신규 설치되는 전시물의 전원관리를 기존 통합관리시스템에서 제어 할 수 있 도록 컨트롤러와 네트워크를 구축하도록 함

- [B1] '라그랑자트 섬의 일요일 오후' : 슬리이딩 체험방식 보완 필요(슬리이딩 구간을 길게 제작하기)

- [B2] '절규' : 「절규」비춰지는 스크린의  배젤은 액자 형태의 프레임을 사용하도록 함

- [B3] '월하정인-에트르타 절벽의 일몰' : 전시물 외장이 '인형뽑기'이므로 외관의 디테일을 살릴 수 있도록 요소 추가 구성

- [B4] '열린 창가에서 편지를 읽는 여인' : 명화 전시물 프레임 엔틱한 액자형태로 구성

- [B5] '밤의 카페테라스' : 전시물 시작 및 종료 방법 보완필요(수동 스위치 레버 작동 후 제자리로 복귀시키는 방법 보완)

○ 과업추진 일정 협의

- 설계 조정 요청에 대한 보완 후 '22.8.19.(금)까지 설계도서 납품(설계확정)

- 영상콘텐츠는 전시물 제작일정에 맞춰 주기적으로 별도 회의 진행

- '22.9.19.(월) 현장 설치 시작

○ 기타 사항

- 현장 설치 시 전시자재는 방염처리 필요하고, 가벽 설치 시 유도등 보완설치

- 기존 시설물 철거 시 과학관 휴관일에 진행하도록 함

□ 향 후 계 획

○ 설계도서 납품             : 2022. 8. 19.限

○ 현장설치 착수             : 2022. 9. 19.

○ 현장설치 완료 및 시운전   : 2022. 10. 18.

○ 준공검사 및 대금지급      : 2022. 10. 25.(예정)

붙임 1. 설계보고 자료(설계설명서) 1부.

2. 설계보고 자료(설계도면) 1부.  끝.