문서번호	시설관리과-29163
결재일자	2022. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식		최춘근	08/23
			박기용
협조
	급수관리팀장		전동근

2023년 반포배수지 등 8개소

정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획

2022. 8.

강남수도사업소

(시설관리과)

2023년 반포배수지 등 8개소

정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획

『시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 따라 반포배수지 등 8개소에 대하여 2023년 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진계획 보고 드림

※ 관련근거: 본부 시설관리과-24223(2022.8.19.)호, 23년 정밀안전진단(점검) 추진계획 알림

Ⅰ		관련 규정

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전진단	정밀안전점검
법적조항	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
대상시설	• 1종 시설물	• 1,2종 시설물

□ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표1)

구 분	1종 시설물	2종 시설물	종외 시설물
대상	• 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	• 1일 공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	• 배수관로 • 급수시설
	수원지시설, 도·송수관로, 취수관로, 취·정수장, 배수지, 아리수올림터

※  우리시는 정수장 시설용량이 3만톤 이상으로 배·급수시설을 제외한 모든 시설이 1종 시설물

□ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표3)

안전등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물		그 외 시설물
A 등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B•C 등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D•E 등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

○ 배수지, 올림터 진단(점검) 주기 변경: 진단(5,6년→4년), 점검(2,3년→2년)

※  상수도시설물 정밀안전진단(점검) 용역 개선방안 추진계획 보고(안전조사과-1751, '21.2.17.)

Ⅱ		2023년 정밀안전진단(점검) 용역 추진계획

□ 최근 3년간 정밀안전진단(점검) 용역 추진 현황

구 분	정밀안전진단	정밀안전점검	비 고
'20년도	• 배수지: 양재,내곡,일원본 • 올림터: 일원본,내곡	• 배수지: 방배,서초,삼성,수서,봉은 • 올림터: 방배(배), 삼성(배)
'21년도	• 배수지: 서초	• 배수지: 반포 • 올림터: 반포(배)
'22년도	• 배수지: 방배 • 올림터: 방배(배)	• 배수지: 내곡 • 올림터: 내곡(배)	진행중

□ 2023년도 정밀안전진단(점검) 용역 추진계획

○ 대상시설물(8개소): 배수지 5개소, 아리수올림터 3개소

구분	진단•점검	대상시설물	위 치	용 량	준공 연도	평가 등급	내진평가 실시
배 수 지 (5)	진단 (3개소)	반포배수지	서초구 반포동 산180-1	80,000㎥	2003년	B	-
		삼성배수지	강남구 삼성동 82	30,000㎥	2013년	B	-
		봉은배수지	강남구 삼성동 82	12,000㎥	2013년	B	-
	점검 (2개소)	서초배수지	서초구 서초동 393-1	60,000㎥	1987년	B	-
		양재배수지	서초구 서초동 269-4	12,000㎥	1985년	B	-

구분	진단•점검	대상시설물	위 치	급수량	준공 연도	평가 등급	내진성능평가실시
아리수 올림터 (3)	진단 (2개소)	삼성(배)	강남구 삼성동 82	126,000㎥	2013년	B	-
		반포(배)	서초구 반포4동 산180-1	2,100㎥	2003년	B	-
	점검 (1개소)	양재(배)	서초구 서초동 269-4	121,544㎥	2020년	A	내진성능평가대상

○ 용역시행: 2023.2. ~ 2023.12.

○ 소요예산: 266,431천원(기술용역 타당성 심사 전 금액)

Ⅲ		향후 계획

□ 2022. 08. 기술용역 타당성 심사 요청(사업소 → 기술심사담당관)

○ 기술용역 타당성 심사 결과 제출(사업소 → 본부 시설관리과)

□ 2023. 02. 용역 발주

○ 급수운영과(3개소): 배수지 2개소(삼성, 봉은), 올림터 1개소〔삼성(배)〕

○ 시설관리과(5개소): 배수지 3개소(반포, 서초, 양재), 올림터 2개소〔반포(배), 양재(배)〕

□ 2023. 03. 용역 착수

□ 2023. 10. 기술심의

□ 2023. 12. 용역 준공

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.