문서번호	기전과-26826
결재일자	2022. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
진수경		이지영	08/23
			김은덕
협 조

「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

작업지시(3차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8. 23.(화)

동부도로사업소

(기전과)

「2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

작업지시(3차) 계획 보고

우리 사업소에서 관리하는 교통안전표지의 유지관리 및 경찰청 규제사항 이행을 위하여 작업지시(3차)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		교통안전표지 설치 현황

2022. 1. 1. 기준

구분	교통안전표지(개)						비고
	계	주의표지	규제표지	지시표지	보조표지	기 타
합계	******	***	*****	*****	*****	*****
강남구	*****	***	*****	*****	*****	***
서초구	***	**	***	***	***	**
송파구	*****	***	*****	*****	*****	***
강동구	*****	***	*****	*****	*****	***

2		사업개요

□ 사 업 명: 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용: 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 교통안전표지 유지보수

□ 사업기간: 2022. 4. 5. ~ 2022. 12. 31.

□ 계 약 자: 삼정유리샷시(주) 대표 오주석

□ 계약금액: 금94,947,110원

□ 감리업체: 주식회사 도시연구 대표 김윤주

3		작업지시 계획

□ 작업차수: 작업지시 3차

□ 작업기간: 작업지시일로부터 ~ 2022. 10. 7.(금)

□ 작업지시 금액: ************

□ 작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
1	교통관리과-6584(2022.3.29.)	강남구청 앞	#311 #407 중형2(신호기) 신설 2set #311 #407 중형2 철거 2set #214 #307 #407 중형2 철거
2	교통관리과-20220(2021.11.1.)	성내초교	#329 중형1(신호기) 신설 2매
3	교통관리과-22053(2021.10.8.)	강일동성당	#311 #407 중형2(신호기) 신설
4	교통관리과-627(2022.1.7.)	서하남IC입구	#309 #407 중형2(신호기) 철거 2set
5	교통관리과-2179(2022.1.27.)	석촌고분역	#132 보조표지 중형1(정주식) 신설
6	교통관리과-5113(2022.3.11.)	양산로	#303 중형1(교차로대) 신설 6매
7	응답소********6900022	염곡동 260-3	페퍼폴 철거, 교차로대 신설 #224 중형2(가로등) 이설
8	응답소********3900219	압구정역	#228 중형1(가로등) 이설
9	주차관리과-46579(2022.6.7.)	가락동 195-1	#219 #419 중형1(가로등) 이설
10	응답소********4808521	잠실역	#311 #407 중형2(신호기) 신설
11	응답소********3804987	삼성로 238	지주 교체
12	응답소********0900873	내곡동 184-26	#116 중형1(가로등) 교체
13	교통행정과-10992(2022.6.28.)	도곡로 320	#219 #428 중형1(가로등) 교체
14	2구역 연간단가 작업지시	마천동 29-1	#224 중형1(신호기) 교체 3매 #226 중형2(신호기) 교체 2매 #213 214 중형2(신호기) 교체
15	응답소********6900613	잠실동 50	#313 장애물표적표지 중형1(정주식)교체
16	경정비 순찰	상일동 498	#322 중형1(가로등) 교체
17	응답소********8900754	논현경복아파트	보조표지(교차로대) 교체
18	교통관리과-6282(2022.3.25.)	대한볼링협회	#325 중형1(정주식) 철거 #134 보조표지 중형1(정주식) 신설
		토끼굴입구	#134 보조표지 중형1(신호기) 신설
		올림픽공원북2문	보조표지(신호기) 신설 2매
		올림픽공원	#134 보조표지 중형1(신호기) 신설 2set
		갑을아파트	#322 중형1(정주식) 교체 #134 보조표지 중형1(정주식) 신설
		잠실지구대	보조표지(신호기) 신설 2매
19	교통관리과-6584(2022.3.29.)	성내1교	#311 #407 중형2(신호기) 신설
20	교통관리과-6830(2022.3.31.)	천중로 57	#329 중형1(신호기) 신설
21	교통관리과-6830(2022.3.31.)	강일동 693	#329 중형1(신호기) 이설
22	응답소********8900655	신천동 20-50	#205 중형1(정주식) 교체 2매
23	수서서 교통과-8051(2022.7.13.)	대치쌍용아파트	#216 중형2(신호기) 이설
24	수서서 교통과-8051(2022.7.13.)	세곡동사거리 연등	보조표지 중형2(신호기) 신설
25	교통운영과-26139(2022.7.20.)	송파IC진출램프	보조표지 중형2(신호기) 신설
26	경정비순찰(2022.8.3.)	영동6교	#313 장애물표적표지 중형1(정주식)교체
27	경정비순찰(2022.8.3.)	자곡로 186	#325 중형1(가로등) 교체
28	송파경찰서 유선민원	잠실동 5	#311 #407 중형2(신호기) 교체

□ 작업완료보고서 제출기한 : 2022. 10. 7.(금)

□ 작업지시 내용을 2022년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 시공업체 및 감리업체에 발송하여 기한 내 완료토록 지시

4		보고자 의견

□ 시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙임  1. 작업지시(3차) 설계내역서 1부.

2. 설계도면(별도) 1부.  끝.