문서번호	수변감성도시과-139
결재일자	2022. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
나영탁		강승곤	08/23
			박홍봉
협 조

「2021년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」 계약변경 검토보고

「2021년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」

계약변경 검토보고

2022.  8.

물순환안전국

(수변감성도시과)

「2021년 지하수 보조관측망 관리개선 용역」 계약변경 검토보고

계약내용 변경사항을 보고하고 계약금액을 조정하여 사업 관리에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2021년 지하수 보조관측망 관리개선 용역

ㅇ 용역기간 : 2021. 5. 26. ~ 2022. 8. 25.

ㅇ 계약금액 : 524,631,550원

ㅇ 용 역 사 : (주)지오그린21, (사)한국지하수토양환경학회

ㅇ 과업내용

- 지하수 측정 부적합 지점 검토 및 신규지점 재배치(종로·은평·서대문구)

- 지하수 전용측정시설 확충 및 석촌호수·신월여의지하도로 주변 수위 조사

*************************************************************************************

*******************************************

********************************************

□ 계약변경

ㅇ (변경사유) 지하수 측정시설 재배치(이설) 물량 감소(7 → 5개소)

- 공간적 균형 분포, 적은 지하수 이용량 등 조건을 충족하는 시설이 부족하고 ********************로 신규지점 선정에 차질

ㅇ (변경내용) ******************************

- 손해배상공제료는 증감된 순계약금액이 당초 보험 또는 공제가입금액의 10%(47백만) 이내인 경우에는 증액 또는 감액하지 아니 함

※ 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제6조제2항

<계약금액 구성항목별 변경내역>

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증 감	비 고
	당 초	변 경
1. 인 건 비	**********	**********	*
2. 경 비	***********	***********	****************	*****
3. 제 경 비	**********	**********	*
4. 기 술 료	**********	**********	*
5. 손해배상공제료	*********	*********	*
6. 총 원 가	***********	***********	****************
7. 부 가 가 치 세	**********	**********	**************
계	***********	***********	****************

□ 향후계획

ㅇ 변경계약 체결 요청(재무과)

붙임  1. 산출내역서(변경) 1부.

2. 합의각서(안) 1부.  끝.