투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차) 설계변경 시행

1. 기전과-24938(2022.08.23.)호 설계변경 검토보고와 관련입니다.

2. 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(2차)

나. 공사기간 : 2021. 11. 19. ~ 2022. 10. 17.

다. 계약업체 : 광일이엔씨(주) 대표 김현실

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	25,930,000원	23,914,000원	감) 2,016,000원

마. 변경사유 : 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 실제 시공물량 정산, 제경비 정산, 음향신호기 기능검사비 및 폐기물처리비 등 수정 내용을 반영한 내역의 변경

바. 예산과목 : 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	오태환		기전과장	08/23
김형집
협조자
시행	기전과-24947	(	2022.08.23	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개