문서번호	치수과-22905
결재일자	2022. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
이성연		최연호	08/24
			박상보
협 조
	기반시설과장			代김일문
	총무과장			정현석
	기획예산과장			김영창

- 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 -

공원계획 변경관련 현안사항 조치계획 보고

2022. 08.

한 강 사 업 본 부

(시   설   부)

- 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 -

공원계획 변경관련 현안사항 조치계획 보고

선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성사업에 따른 도시공원심의(공원계획 변경결정 등) 관련 현안사항 조치계획을 보고드림

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성

○ 사 업 비 : 112억원

○ 사업내용 : 한강 강심으로 가는 보행잔교와 수상갤러리 조성(연계)

- 보행잔교 : 상부 223m, 하부 180m

- 수상갤러리 : 직경 21m, 높이 10m(월드컵 분수 재활용)

○ 추진단계 : 기본 및 실시설계용역 시행 중

► 용  역  사 : (주)삼풍이엔지종합건축사사무소 외 4개사

► 용 역 기간 : 2020. 12. 03. ~ 2022. 12. 22.

► 용 역금 액 : 332,567천원(보행잔교-치수과), 456,447천원(수상갤러리-기반시설과)

▢ 현안사항

○ 건   명 : 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성에 따른 공원조성계획 변경 용역 시행 검토보고

○ 관련근거

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법 제16조의2(공원조성계획의 결정)

- 서부공원녹지사업소 *********************호

○ 용역시행 사유

- 당초 선유도 공원 *************************************************************************************************됨

- 실시설계 추진 중 *********************************************************************************************함

- 이와관련 실시설계 추진 공정 등을 고려하여 *****************************************************함

▢ 조치계획(안)

○ 추진방향

선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 기본 및 실시설계용역 준공 이전 ******************************************** 시행

○ 용역개요

- 용 역 명 : 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성사업 관련 선유도근린공원 조성계획 변경 용역

- 용역기간 : 착수일로부터 90일 이내

- 과업내용

► 공원조성계획 변경 계획 수립, 서울시 도시공원위원회 심의 자료 일체 작성

► 도시공원위원회 심의 등 발주청이 요구하는 인·허가 업무수행 등

► 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 조감도 및 투시도 제작

- 용 역 비 : *****************

- 계약방법 : ***********

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 **********

► 추정가격 ************************************************

- 계약상대 : 주식회사 ******************

- 예산과목 : 한강사업본부 기획예산과, 한강공원 관리 및 운영, 한강 하천시설관리(도시개발특별회계), 선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성(시설비)

▢ 추진일정

○ '22. 08. ~ 09. : 변경계획(도서) 작성 및 서울시 사전협의

○ '22. 09. ~ 10. : 주민의견청취, 유관부서협의

○ '22. 10. ~ 11. : 도시공원위원회 심의 상정 및 완료

붙임 1. 과업내용서(안) 1부

2. 산출기초조사서(견적서 및 사업자등록증 포함) 1부

3. 여성기업확인서 1부

4. 유관부서 관련공문 1부. 끝.