문서번호	기반시설과-22774
결재일자	2022. 8. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
고준열		이병철	08/25
			박상보
협 조
	기획예산과장			김영창
	총무과장			정현석
	주무관			조승만

『2022년 반포달빛무지개분수 유지보수공사』

제1회 설계변경 계획

2022. 8. 25.

서울특별시 한강사업본부

(기반시설과)

『2022년 반포달빛무지개분수 유지보수공사』

제1회 설계변경 계획

『2022년 반포달빛무지개분수 유지보수공사(연간단가)』관련 기 실정보고사항 등을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

1		계약 현황

□ 공 사 명: 2022년 반포달빛무지개분수 유지보수공사(연간단가)

□ 계 약 자: (주)삼무조경 (대표자: ***)

□ 계약기간: ‘22. 3. 8. ~ '22. 12. 20.

□ 계약금액: ************

2		추진 근거

□ 설계변경 사유 : 분수가동 중 시설물 내용연수 전기·기계(10년), 통신·전산(5~9년) 경과로 인버터, 분사노즐(스윙모터, 센서 등), 음향시스템, 기상관측시스템 등이 고장 발생되어, 분수 정상가동을 위해 긴급한 정비에 따른 신규 공사물량 및 기존 물량 증·감 발생

○ '22. 6. 14 : 분수 부력체하부 준설물량 발생 실정보고 (제1회)

- '22. 6. 20 : 제4차 작업지시 (기반시설과-21415)

○ '22. 8. 09 : 점검결과 신규 및 공사물량 증·감 실정보고 (제2,3회)

- '22. 8. 11 : 제6차 작업지시 (기반시설과-22515)

- '22. 8. 16 : 제7차 작업지시 (기반시설과-22561)

□ 설계변경 내용

○ 계약금액 변경 : *********

- 당초: ************ ⇒ 변경: ************

○ 계약기간 변경 : 변경사항 없음

3		설계변경 계획

□ 설계변경 총괄내역

(단위: 원)

구 분		현 계약금액	변경 계약금액 (1회)	증·감 금액
순공사비	재료비	***********	***********	***********
	노무비	**********	***********	**********
	경 비	**********	**********	*********
순공사비 계 (a)		***********	***********	***********
교통통제비 (b)		*********	**********	*********
일반관리비 (c)		**********	**********	********
이윤 (d)		**********	**********	*********
고용개선지원비 (e)		*********	**********	*********
공사원가 계 (a~e)		***********	***********	*******
부가가치세		**********	**********	******
총공사비		***********	***********	*******

❍ 물량 증가: *********** (제1~3차 실정보고사항)

물량 증가 내역 ***********	▪ 뚝섬 물보라극장분수 준설 작업 : 1식, ******* (1차) ▪ 인버터 구매 및 교체 : 6개, ******** (2차) ▪ 분수 음향 시스템 교체 : 1식, ******** (2차) ▪ 기상관측 시스템 교체 : 1식, ******* (2차) ▪ 장비(스카이) 사용 : 5일, ******* (2차) ▪ 교통통제 및 안전관리 : 5일, ******* (2차) ▪ 분수노즐(스윙모터, 센서) 교체 : 34대, ******** (3차) ▪ 컨트롤보드 수리 : 10대, ******* (3차) ▪ 누수 노즐 부속품 교체 : 24set, ******* (3차) ▪ LED등 점검,철거,설치 : 9대, ******* (3차) ▪ 장비(스카이) 사용 : 14일, ******* (3차) ▪ 교통통제 및 안전관리 : 14일, ******* (3차)

❍ 물량 감소: ***********

물량 감소 내역 ***********	▪ 분수노즐(컷팅모터) 교체 : 2대, ******* ▪ 신형 분사노즐(스윙모터,밸브) 설치 : 25개, ********* ▪ 심정펌프 구매(모터,펌프) : 1set, ******** ▪ 인버터 수리 : 3대, ******* ▪ 안테나 폴 제작 및 설치 : 2대, ***** ▪ 장비(스카이) 사용 : 7일, ******* ▪ 장비(크레인) 사용 : 8시간, ***** ▪ 교통통제 및 안전관리 : 8일, *******

4		향후 계획

□ 당초 신형 분사노즐 25대를 교체 할 계획이었으나, 기존 시설물 내용연수 경과 등으로 고장 장비에 대해 분수 정상가동을 위해 긴급히 우선 순위로 정비 시행

□ 신형 분사노즐 교체은 계약심사 조정금액 및 낙찰차액 예산(약 1억원)으로 분수가동 종료 후 '22. 11월 10대 교체 할 계획

(2023년 본예산으로 고장난(상·하류 19~20번 교각) 40대 교체 예정)

□ '22. 8월말 : 계약변경 의뢰 (기반시설과→총무과)

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(제1회) 1부.

2. 실정보고서(제1~2차) 1부.

3. 설계변경(감액) 합의서 1부.

4. 검증확인서 1부.

5. 설계변경 요청(공문) 서류 1부.  끝.