문서번호	시설관리과-28870
결재일자	2022. 8. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
유명수	김성호	송병욱		08/25
				권태규
협 조
	급수운영과장		이승완
	급수관리팀장		최용진

『2023년 배수지, 아리수올림터』

정밀점검 및 정밀안전진단용역 추진계획

2022. 8

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 배수지, 아리수올림터

정밀안전진단(점검) 용역 추진계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 따라 2023년 배수지, 아리수올림터의 정밀안전진단 및 정밀안전점검 추진계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 제12조

ㅇ '23년 정밀안전진단(점검) 추진계획;본부 시설관리과-24111(22.8.17)]

ㅇ 안전점검 실시 주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표3)

안전등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물	그 외 시설물
A 등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B·C 등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D·E 등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

ㅇ 배수지,올림터 진단 및 점검 주기변경 : 4년(진단), 2년(점검)

※ 상수도시설물 정밀안전진단(점검)용역 개선방안 추진계획보고(안전조사과-1751, '21.2.17)

Ⅱ		그간 추진사항

□ 정밀안전진단(점검) 대상 시설물

구분	계(개소)		배수지	아리수올림터	비고
1 종 시설물	계	16	8	8
	급수운영과	7	공릉,월계,상계	상계,중계,쌍문1, 쌍문2
	시설관리과	9	419,번동소,우이, 수유5,수유6	미아,수유,우이, 번동

□ 최근 5년간 정밀안전진단(점검) 현황

실시연도	계	정밀안전진단	정밀안전점검	비고
2018년	11개소	-	공릉배수지 등 11개소	B등급
2019년	12개소	공릉배수지 등 12개소	-	B등급
2020년	3개소	419배수지 등 3개소	-	B등급
2021년	12개소	-	공릉배수지 등 12개소	B등급
2022년	5개소	번동소배수지 등 2개소	419배수지 등 3개소	진행중

Ⅲ		2023년 추진계획

□ 2023년 정밀안전진단(점검) 대상 : 10개소

ㅇ 정밀안전진단 : 배수지 2개소, 올림터 2개소

ㅇ 정밀안전점검 : 배수지 3개소, 올림터 3개소

구분		대상시설물	용량(톤)	준공년도	비고
정밀 안전 진단	계	4개소
	배수지	월계	100,000	1988년
		수유6	6,100	1992년
	올림터	쌍문2	2,742	1981년
		수유	15,171	1989년
정밀 안전 점검	계	6개소
	배수지	공릉	170,000	1998년
		상계2	1,400	1983년
		우이	2,000	1986년
	올림터	중계	2,016	1986년
		미아	36,028	1980년
		우이	9,800	1983년

□ 2023년 정밀안전진단(점검) 용역개요

ㅇ 용역내용

용역명	시설물명	사업비 (천원)	담당부서
	10개소	271,557
2023년 월계배수지 등 5개소 정밀안전진단및점검	배수지 : 월계,공릉,상계 올림터 : 쌍문2,중계	190,278	급수운영과
2023년 수유6배수지 등 5개소 정밀안전진단및점검	배수지 : 수유6,우이 올림터 : 수유,미아,우이	81,279	시설관리과

ㅇ 추진기간 : 2023. 3. ~ 11. 30.

ㅇ 소요예산 : 271,557천원

□ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰

□ 추진일정

ㅇ 2022. 8.      : 자료조사 및 설계서 작성, 기술용역타당성 심사

ㅇ 2023. 2.      : 용역발주

ㅇ 2023. 3.      : 용역 착수보고회 개최

ㅇ 2023. 3.~11. : 용역시행

※ 2023년도 배수지 청소일정과 병행 시행

ㅇ 2023. 9~11. : 용역 최종보고회 및 결과보고

ㅇ 2023. 11.     : 용역준공 및 FMS 실적 입력

ㅇ 2023. 12.     : 용역준공 결과를 토대로 보수및보강 계획수립

붙임  설계내역서 2부.  끝.