문서번호	설비부-28091
결재일자	2022. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	08/26
			김호성
협 조

『로봇과학관 건립 기계설비공사(1차)』 설계변경(정산) 검토보고

2022. 8.

도시기반시설본부

【설 비 부】

『로봇과학관 건립 기계설비공사(1차)』 설계변경(정산) 검토보고

우리 본부에서 추진 중인『로봇과학관 건립 기계설비공사』 관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된 1차수 준공정산 보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 로봇과학관 건립 기계설비공사

위    치 : 도봉구 창동 1-25

규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308.39㎡

공사기간 : (총차) '21.10.20. ~ '23.08.03.

(1차) '21.10.20. ~ '22.08.24.

계약금액 : (1차) 30,000,000원 (총차) 1,972,649,750원

시 공 사 : (주)기술환경 외 1개사

건설사업관리단 : ㈜종합건축사사무소 근정 외 1

Ⅱ		관 련 근 거

공사지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 (공사계약일반조건 제6절)

「로봇과학관 건립 기계설비공사」설계변경 준공정산 적정성 검토

[KDU(대외) 제22-199호(2022. 8. 23)]

Ⅲ		검토 주요내용

설계변경 사유

- 산업안전보건관리비 및 각종 보험료 등 사후정산 항목의 정산

설계변경 (정산) 내역

(단위: 원)

구 분		1차 공사비 증 감			비고
		당 초	변 경	증 감
재료비		5,140,642	5,140,642	0
노무비		11,880,371	11,880,371	0
소 계		17,021,013	17,021,013	0
경비	산출경비	368	368	0
	산재보험료	439,573	439,573	0
	고용보험료	119,991	119,991	0
	건강보험료	437,197	0	-437,197
	연금보험료	573,582	252,000	-321,582
	노인장기요양보험료	50,365	0	-50,365
	산업안전보건관리비	2,027,234	2,027,234	0
	기타경비	1,106,365	1,106,365	0
	환경보전비	48,515	0	-48,515
	건설기계대여금 지급보증서 수수료	16,171	0	-16,171
	하도급지급보증발급 수수료	13,099	0	-13,099
	퇴직공제부금비	293,164	293,164	0
	소 계	4,832,460	3,945,531	-886,929
일반관리비		1,218,065	1,169,284	-48,781
이 윤		2,729,640	2,571,006	-158,634
소 계		6,050,525	5,114,815	-935,710
고용개선비(주휴수당)		895,716	0	-895,716
고용개선비(국민연금,건강보험지원)		218,689	0	-218,689
고용개선비(고용개선장려금)		63,979	0	-63,979
소 계		7,164,930	0	-1,178,384
공사비원가계		27,272,728	25,000,000	-2,272,728
부가세		2,727,272	2,500,000	-227,272
총 계		30,000,000	27,500,000	-2,500,000

변경계약 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공사 기간	총차	2021. 10. 20.****************	2021. 10. 20. ~ 2023. 08. 03.	****
	1차	*****************************	2021. 10. 20. ~ 2022. 08. 24.	****
계약금액	총차	1,972,649,750원	1,970,149,750원	************	보험료등 정산
	1차	************	27,500,000원

건설사업관리단 검토의견

- 「로봇과학관 건립 기계설비공사」의 1차수에 대한 현장여건을 반영하여 설계변경 준공정산내역서 등을 검토한 결과 시공사인 (주)기술환경으로부터 제출된 설계변경 준공정산이 적정한 것으로 사료됨

Ⅳ		보고자 의견

기계설비공사 건설사업관리단의 기술의견사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단 되어, 계약부서에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리단 설계변경(정산) 검토보고서 1부.

2. 검증확인서 및 합의각서 각 1부.  끝.