문서번호	설비부-28144
결재일자	2022. 8. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
강민우		김현기	08/29
			김호성
협조

\

『광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2022. 8.

도시기반시설본부

(설비부)

『광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사』

납품기한 연장 검토 보고

『광역소공인특화지원센터 건립 전기, 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단이 제출한 관급자재 납품기한 연장 요청건에 대하여 검토보고 드림

1
		공사개요

ㅇ 사 업 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 공사(전기, 통신)

ㅇ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

ㅇ 계약현황

(단위 : 원)

구 분	차 수	계약금액	계약기간	계약업체
전 기	***	***********	******************	****** ********
	***	***********	*******************
통 신	***	***********	******************	********
	***	***********	******************

ㅇ 건설사업관리단 : 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소

2
		관련근거

ㅇ 관급자재 납품기한 연장 검토보고

************************************************

ㅇ 물품구매(제조) 계약일반조건 제25조(계약기간의 연장)

3
		검토내용

ㅇ 납품기한 연장내용

(단위 : 원)

구 분	납품요구번호 (계약번호)	품 명	계약자	계약금액	납품기한
					당초	변경(연장)
전기	**************** *****************	*****	******	**********	********	**********
	**************** *****************	******	******	**********	*********	**********
	**************** *****************	******	*******	**********	*********	**********
	***********	********	********	**********	********	**********
통신	**************** *****************	****	*******	**********	*********	**********
	**************** *****************	******	*******	*******	*********	**********
	**************** *****************	******	*******	*********	*********	**********

ㅇ 납품기한 연장 사유

- **************************************************************

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- ****************************************************

ㅇ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 계약금액 : 변동없음

4
		보고자 의견

ㅇ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 통보하여 납품기한 연장 조치하고자 함.

붙 임  건설사업관리단 공문 1식.  끝.