문서번호	시설관리과-33102
결재일자	2022. 8. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장		중부수도사업소장
유세종	유형근	이동욱		08/29
				장청락
협 조
	급수운영과장		김상웅
	급수운영팀장		박장진
	시설운영팀장		이유찬

2023년 경내배수지 등 12개소

정밀안전진단 용역 추진계획

2022. 9.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2023년 경내배수지 등 12개소

정밀안전진단 용역 추진계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조, 제12조 및 동법시행령 제8조에 따라 경내배수지 등 12개소에 대한 2023년 정밀안전진단 용역 추진계획을 보고 드림.

관련근거 : 2023년 배수지·아리수올림터 정밀안전진단(점검)추진계획

[본부 시설관리과-24223(2022.8.19)]

1	관 련 규 정

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전진단	정밀안전점검
법적조항	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(정밀안전진단의 실시)
대상시설	• 1종 시설물	• 1,2종 시설물

□ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표 1)

구 분	1종시설물	2종시설물	종외 시설물
대 상	• 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	• 1일 공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	• 배수관로 • 급수시설
	수원지시설, 도･송수관로, 취수시설, 취･정수장, 배수지, 아리수올림터

- 우리시는 정수장 시설용량이 3만톤 이상으로 배·급수시설을 제외한 모든 시설이 1종시설물

□ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표 3)

안전등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물	그 외 시설물
A등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B･C등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D･E등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

❍ 배수지, 올림터 진단 및 점검 주기 변경 : 4년(진단), 점검(2년)

※ 상수도시설물 정밀안전진단(점검)용역 개선방안 추진계획 보고(안전조사과-1751, `21.2.17)

▶ 기존 : B등급 이상으로서 5,6년에 진단 1회, 2,3년에 점검 1회 시행

→ 도․송수관은 기존과 동일하게 시행

▶ 변경 : 4년에 진단 1회, 2년에 점검 1회 시행

2	발 주 계 획

□ 대상시설물

❍ 배수지7개소 15,300㎥, 아리수올림터 5개소 86,448㎥/일

구분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	평가
배 수 지 (7)	정밀 안전 진단 (7개소)	*****	***********	******	*****	*
		*****	***************	******	*****	*
		******	************	******	*****	*
		*****	************	****	*****	*
		*****	***************	******	*****	*
		*****	*************	****	*****	*
		*****	***************	******	*****	*

구분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	평가
아리수올림터 (5)	정밀 안전 진단 (5개소)	******	*************	********	*****	*
		******	*************	******	*****	*
		*****	*************	*********	*****	*
		*****	**********	******	*****	*
		*****	**************	**********	*****	*

□ 용역기간

❍ 2023. 4 ~ 2023. 12(착공일로부터 240일간)

□ 추진일정

❍ 2022. 09 : 자료조사 및 설계서 작성, 기술용역타당성 심사요청

(제637차 기술용역타당성심사 결과 통보)

❍ 2023. 02 : 구매규격 사전공개 및 기술용역 사업수행능력 세부평가기준 협의

❍ 2023. 03 : 용역발주

❍ 2023. 04 ~ 12 : 사업착수

※ 2023년도 상･하반기 배수지 청소일정과 병행 시행

❍ 2023. 12 : 용역준공(용역 결과 보고 및 FMS 실적 입력)

□ 사업비

❍ 소요예산액 : *********

(2022년 엔지니어링기술부분 노임단가와 건설업 시중노임단가 적용)

❍ 예산과목 : 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

3	계 약 방 법

□ 입찰방식

❍ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

❍ 입찰참가자격 :

가. 지방자치단체를 당사자로하는 법률 시행령 제13조, 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 입찰참가 자격을 갖춘 업체

나. 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조에 의한 시설물유지관리업 또는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제28조, 동법 시행령 제23조에 의한 수리시설분야 및 건축분야 또는 종합분야의 안전진단전문기관으로 등록된 업체로 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야의 정밀점검 또는 정밀안전진단 교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체로서 서울특별시에 주된 영업소를 둔 업체

다. 입찰은 공동도급으로 참여할 수 있으며, 평가자료 제출시 공동수급 표준협정서(공동이행방식)를 제출하여야 하고 도급업체는 2개사까지 구성

❍ 사업수행능력평가(PQ) 및 적격심사 대상임

- 근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제1항 제2호[별표4](2019.2.25.), 서울특별시 기술용역 사업수행능력 세부평가기준(2016.12.2.), 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행안부 예규 제198호, 2022.1.11.)

❍ 낙찰자 결정방법

- 방법 : 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 참가업체중 “사업수행능력 세부평가기준”에 의거 최고점수 획득업체

배점한도(100점) = 사업수행능력평가(34점) + 책임기술자평가(1점) + 지역업체참여도(3점) + 경영상태(2점) +

입찰가격(60점) + 기술인력(△10점)+계약질서준수(△1점)

※ 추정가격 2억 이상으로 P,Q대상 기술용역에 따라 적격심사 실시

4	행 정 사 항

□ 본청 재무국 재무과 “용역계약”의뢰 : 2023. 2월 중

□ 계약 및 착수 : 2023. 4월 중

□ 정밀안전점검 용역 준공 : 2023. 12월

붙임 : 1. 용역설명서 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 정밀안전진단(점검)추진계획(본부) 1부.  끝.