문서번호	토목부-15080
결재일자	2021. 8. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
윤창렬		장종환	08/05 임춘근
협 조
	주무관			노순재

- 창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사 -

정기안전점검 수행기관 선정 계획 보고

2021. 8.

도시기반시설본부

(토목부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사 -

정기안전점검 수행기관 선정 계획보고

창동 상계 동서간 연결교량(보차도교 및 보행교) 건설공사와 관련하여「건설기술 진흥법 」제62조제4항에 의해 발주자가 안전점검 수행기관을 지정토록 되어 있어 이에 대한 선정계획 보고임

1		공 사 개 요

구 분	창동상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사	창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사	비 고
규 모	연장 : 118m, 폭 : 32m(차도 20m, 보도 12m)	연 결 로 : 110.5m 폭 : 10.0~15m
공사기간	2021.4.19. ~ 2024.4.18.	2021.4.19. ~ 2024.4.18.
총공사비	146억 원	105억 원
시공사	하웅종합건설(주) 외 1	청광건설(주) 외 1
감리단	㈜동해종합기술공사 외 2

2		보 고 내 용

□ 정기안전점검 수행기관 선정

❍ 관련근거

-「건설기술진흥법」제62조제4항(발주처에서 안전점검 수행기관 지정)

-「건설기술진흥법 시행령」제100조제1항(안전점검 시기·방법 등)

-「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(국토교통부고시 제2020-47호)

- 도기본 건설공사장 안전점검 수행기관 지정체계구축(본부장 방침<2020.9.18.>)

❍ 정기안전점검 대상 공종 및 비용

구분	창동상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사		창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사
	정기안전점검 대상	시행횟수	정기안전점검 대상	시행횟수
1,2종 시설물	가시설공사 및 기초공사 시공 시 (콘크리트 타설 전)	4회	-	-
	하부공사 시공시	4회
	상부공사 시공시	1회
	초기점검	1회
1,2종 외시설물	천공기를 사용하는 공사	4회	천공기를 사용하는 공사	6회
	항타 및 항발기를 사용하는 공사	4회	항타 및 항발기를 사용하는 공사	6회
	높이 2M이상 흙막이 지보공	2회	높이 2M 이상인 흙막이 지보공 ※ 지하차도 2회 포함(100m 미만)	5회
	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	4회	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	4회
점검 비용	계 : 78,000천원(부가세 제외)		계 : 52,500천원(부가세 제외)
	1,2종 시설물 : 43,000천원 1,2종 외 시설물 : 35,000천원		1,2종 시설물 : 천원 1,2종 외 시설물 : 52,500천원

□ 안전점검 수행기관 선정 절차

안전점검 수행기관 공개 모집※ (인터넷 홈페이지)	→	등록 신청서 제출	→	안전점검 수행기관 등록명부 작성 및 홈페이지 공개	→	발주처에 안전점검 수행기관 지정요청
발주자		안전점검 수행기관		발주자		시공사
안전점검 수행능력평가 및 수행기관 선정을 위한 공고	→	세부평가 기준에 따라 접수한 안전점검 수행기관 평가 및 지정	→	시공사에 안전점검 수행기관 지정 통보	→	안전점검 수행기관과 계약체결 및 결과 발주자에게 통보
발주자		발주자		발주자		시공사

❍ 안전점검 수행기관 지정시 유의 사항

- 해당 건설공사 설계·시공·감리를 수행하는 자의 계열회사인 안전점검기관은 제외

- 공사별 특성에 적합한 세부평가 기준 마련

□ 안전점검 수행기관 선정 기준(보차도교, 보행교)

❍ 건설기술 진흥법 시행규칙 28조 ①항 2에 의거 안전점검비용이 1억미만으로 추정가격이 1억원 미만인 기술용역평가 기준에 의거 선정

- 수행능력 10점+입찰가격90점 : PQ를 하지 않는 기술용역

3		행 정 사 항

□ 안전점검 수행기관 선정 추진 일정

❍ ‘21.7.                    : 안전점검 수행기관 지정요청

❍ ‘21.8.18. ~  ‘21.8.20. : 안전점검 수행기관 선정을 위한 공고

❍ ‘21.8.26. ~  ‘21.8.31. : 안전점검 수행기관 평가 및 지정

❍ ‘21.9.1.                 : 안전점검 수행기관 통보 및 계약

붙임  1. 정기안전점검 수행기관 선정 요청 공문(보차도교, 보행교) 각 1부.

2. 수행기관 공고문 및 세부평가기준(보차도교,보행교) 각 1부.

3. 안전점검 수행기관 리스트 1부.   끝