투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(로봇과학관 건립 기계설비공사)

우리 본부에서 추진중인『로봇과학관 건립 기계설비공사』와 관련하여, 설계변경(정산) 사항이 발생하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 로봇과학관 건립 소방공사

2. 계 약 자 : (주)기술환경 대표 신 응 수

3. 변경계약 내용

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공사 기간	총차	2021.10. 20. ~ 2023. 8. 3.	2021. 7. 30. ~ 2023. 8. 3.	변경없음
	1차	2021.10. 20. ~ 2022. 8.24.	2021. 7. 30. ~ 2022. 8.24.	변경없음
계약금액	총차	1,972,649,750원	1,970,149,750원	감)2,500,000원	보험료등 정산
	1차	30,000,000원	27,500,000원

4. 변경사유 : 1차수 준공관련 보험료 등 정산 설계변경

5. 귀책기관 및 지체상금 부과부여 : 서울특별시 도시기반시설본부 (미부과)

6. 예산과목 : 경제정책실 경제정책과, 활력이 넘치는 경제 환경 구축, 지역격차                 해소를 위한 균형발전 추진, 로봇과학관 건립, 시설비

붙  임 : 1. 기계설비공사 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

2. 건설사업관리자 설계변경(정산) 검토보고 1부.

3. 검증확인서 및 합의서 각 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김세익		도로설비과장	代임현철		설비부장	08/30
김호성
협조자
시행	설비부-28249	(	2022.08.30	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	openland88@seoul.go.kr	/	부분공개(5)