문서번호	시설관리과-33476
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이승환		유세종	08/31
			이동욱
협조

사토장 변경에 따른 검토보고

(2022년 정릉동 등 10개동 상수도공사)

2022. 08

중부수도사업소

시설관리과

「2022년 정릉동 등 10개동 상수도공사」

사토처리장 변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인 「2022년 정릉동 등 10개동 상수도공사」와 관련하여 사토장 변경에 대한 실정보고가 접수된바 적정성 등을 검토하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2022년 정릉동 등 10개동 상수도공사

□ 공사개요 : D=15~300mm, L=1,050m

□ 계약기간 : 2022.04.19. ~ 2023.06.30

□ 계약금액 : 금************

□ 수 급 자 : ***************

Ⅱ		보고배경

□ 사토장 변경 사유 : 수도권매립지관리공사 토사반입 불가 회신

○ 수도권매립지관리공사로 토사반입 요청하였으나 토사 반입불가 통보

○ 반입 요청 공문 발송 및 접수 현황

반입 요청 공문	회신 공문
시설관리과-28954(2022. 07. 06.)	매립부-2250(2022. 08. 23.)

○ 반입 불가 회신 사유: 토사반입기준 부적합(암석 및 골재혼합)

□ 향후 발생하는 잔토에 대한 처리장 변경 필요

○ 당초 수도권매립지로 설계반영하여 계약되었으나, 토사반입불가로 상수도공사 중 발생되는 잔토처리를 위하여 별도 사토장 필요

□ 사토장 변경 개요

○ 위    치 : ***********************

○ 운반거리 : 56.1km(증 9.2km)

※당초 설계현황 : 김포매립지 46.9km

Ⅲ		적정성 검토

□ 사토장 선정 적정성

○ 위    치: ***********************

○ 운반거리: 56.1km(증 9.2km)

○ 토 지 주: *** (매립시공자: ***)

○ 사토장 위치 적합여부 → 적정

- 사토장 주변 차량진출입로 있으며, 관급토사 반출 사토장으로 적정

○ 개발행위허가 관련 → 적정

- 개발행위 허가일자 : 2021.11.30.

- 개발행위 허가기간 : 2021.11.30. ~ 2024.11.29

○ 사토(토사) 반입 동의서 → 징수확인

□ 공사비 검토

○ 운반거리 증가(9.2km)하나 운반도로에 따른 평균주행 속도 증가로 변경단가는 *******으로 당초 계약단가 ******원 보다 *** 감소

- 운반거리 변경에 따른 단가 현황

구분	명칭	규격	단위	단가
당초	잔토처리(0.7상차비별도)	24DT(집하장→매립지 46.9km)	m3	*******
변경	잔토처리(0.7상차비별도)	24DT(집하장→사토장 56.1km)	m3	*******
운반비 단가 증·감				*****

Ⅳ		조치의견

□ 변경 사토장으로 대체하도록 계약업체에 통보

○ 접근 용이성 및 관련 서류 검토 결과, 사토장으로 활용 적합한바 계약업체에 사토장으로 대체토록 통보

□ 변동물량 및 단가는 추후 설계변경에 반영

○ 공사 중 발생된 토사는 우선 사토장으로 처리하되, 추후 설계변경 시 변경물량 및 단가를 적용하여 정산시 반영

붙임 1. 실정보고서 각 1부.

2. 토사반입불가 회신공문.  끝.