문서번호	친환경건물과-415
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	08/31
			서은경
협조
	주무관		장천섭

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

실정보고에 따른 검토보고(건축)

2022. 8.

기후환경본부

(친환경건물과)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

실정보고에 따른 검토보고(건축)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사(건축)와 관련하여 시공자 및 건축감리자로부터 제출된 실정보고 사항에 대해 다음과 같이 검토 보고합니다.

□ 공사개요

가. 공 사 명 : 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사(건축·기계)

나. 공사기간 : '22.3.4. ~ 9.29.

*************************

라. 시 공 자 : (주)마노건설 대표자 정봉휘 외 1개사

마. 감 리 자 : (주)에이펙스건축사사무소 대표자 김현정

바. 전체공정률 : 41%

□ 관련근거

가. 시공자 실정보고서 제출 건 : MANO건-서울특별시-*******04(2022.07.28.)호, MANO건-서울특별시-*******07(2022.08.10.)호

나. 감리자 검토보고서 : Apex-제20220805(2022.08.05.)호,

Apex-제20220822(2022.08.22.)호

□ 실정보고 사항

가. 실정보고 주요내용

- 가설공사(내·외부 비계 및 작업발판) 추가 등에 따른 물량변경

- 내부 1층 바닥, 1~2층 화장실 콘크리트 두께 강화에 따른 물량변경 등

나. 실정보고 검토내용

구 분	실정보고 내용(사유)	도급공사 증·감(원)	비고
가설공사	***************************** ******************************************* ******************************************************************* *************************** ******************************************** ***************************** ************************* *************************** ***************************	************
철근콘크리트공사/ 미장공사	******************* *********************************************************************************************************************** ********************** ************************************************************************************************	***********
소 계		************
제경비 및 부가가치세		************
합 계		************

******************************                                 ******

*********************************************************************************************************

라. 단가적용 기준

❍ 관련 규정

▸관련근거 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정)

① 신규단가(계약단가×) : 설계변경 시점 산정한 단가에 낙찰율(87.676%) 적용

② 계약단가(○) : 기존 계약단가 적용

□ 보고자 처리의견

감리자가 제출한 기술검토의견서가 현장 여건을 반영하여 적정하게 이루어졌다고 판단되어 실정보고 사항에 대하여 승인하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임  1. 감리검토서 및 시공사 실정보고서(비계설치) 1부.

2. 감리검토서 및 시공사 실정보고서(1층 무근타설) 1부.  끝.