문서번호	토목부-29685
결재일자	2022. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
노승환		김동현	09/01
			代김동철
협조
	주무관		박희정

설계변경 검토보고(1회)

(청계천~정릉천 자전거도로 연결공사)

2022. 08.

도시기반시설본부

토 목 부

설계변경(1회) 검토 보고

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

"청계천~정릉천 자전거도로 연결공사"와 관련하여 주관부서(자전거정책과)의 사업구간 조정 요청에 따른 시공물량 변경사항에 대하여 설계변경 검토 보고드림.

	≪ 관 련 근 거 ≫
‣ ********************************************************** - *********************************************** ****************************** ‣ *********************************** - ************************************* - ******************************************

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

○ 규    모 : 고산자교 ~ 신답철교 ~ 중량천 합류부

○ 도 급 비 : 1,089백만원

○ 공사기간 : '22.01.01. ~ '22.12.31.

○ 시 공 사 : 태궁종합건설(주)외 1개사

○ 감 리 단 : (주)수성엔지니어링외 1개사

Ⅱ		변 경 내 용

○ 설계변경 요약                                        단위:천원

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
**	**** ****	********* **********	********* **********	-
	*** ****	*********	*********	-	공종내역 수량변경

○ 설계변경 내용(1회)

- 주요 변경내용                                                          단위:천원

공 종			단위	수 량			금 액
				당초	변경	증·△감	당초	변경	증·△감
	******						*******	*	********
	****	*********	*	*	*	**	******	*	*******
	****	***********	*	*	*	**	*******	*	********
	****	**********	*	*	*	**	******	*	*******
	****	**********	*	*	*	**	******	*	*******
	****	************	*	*	*	**	*******	*	********
	*****						******	*******	*******
	****	**						******	******
	*******	*******						******	******
	*****	*****	*	*	*****	*****		******	******
	*****	****	*	*	*****	*****		******	******
	*****	********	*	*	***	***		*****	*****
	****	***					******	*******	*******
	*******	***********	*	*****	*	******	******	*	*******
	******	*****	*	*****	*	******	*****	*	******
	******	*******						*******	*******
	*****	*************	*	*	*****	*****	*	******	******
	*****	*************	*	*	******	******	*	******	******
	*****	**	*	*	*	*	*	******	******
	******	******	*	*	*****	*****	*	******	******
	******	********	*	*	*****	*****	*	******	******
	******	*******	*	*	**	**	*	*****	*****
	***	***					******	*******	*******
	******	*****	**	*	*	*	***	***	*
	******	****	*	***	***	***	******	******	***
	******	********	*	*	*	*	*****	*****	****
	******	******	*	***	*****	*****	*****	******	******
	******	********	*	*	*	**	*****	*	******
	******	*****	**	*	**	**	*	******	******
	******	**********	*	*	*	*	*	*****	*****
	******	*****	*	*	*****	*****	*	*******	*******
직접공사비			*	*	*	*	*******	*******	*******
	*****		*	*	*	*	******	*******	******
	**		*	*	*	*	*******	*******	*******
	*****		*	*	*	*	******	******	******
*********			*	*	*	*	*********	*********	*******
******			*	*	*	*	*******	*******	*******
******			*	*	*	*	******	*******	******
*******			*	*	*	*	*********	*********	*

○ 책임건설사업관리기술인 검토의견

- **************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		사 업 비 검 토

공 종	전 체 분			비고
	당 초	변 경	증ㆍ감
************	***********	***********	***********
******** *************************	***********	*	************
*******	**********	***********	***********
********	***********	***********	**********
*******	***********	***********	***********
********	**********	**********	**********
*********	*************	*************	***********
*********	***********	***********	***********
**********	**********	***********	**********
9. 총공사비	1,792,991,000	1,792,991,000	-

○ 예산조치 : 사업비 예산범위내에서 시행가능(●)

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 사업계획변경을 통해 조정된 사업구간의 시공물량을 반영하여 설계변경을 실시 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 사업계획변경 방침 1부.

2. 책임기술인 검토의견서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 검토서 1부.  끝.