문서번호	물재생계획과-27788
결재일자	2022. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	09/01
		함명수

사각형거 정밀점검용역 추가예산 지원요청 검토보고 (양천구)

2022. 09.

물재생계획과

사각형거 정밀점검용역 추가예산 지원요청 검토보고 (양천구)

**** 445번지외 10개소 사각형거 정밀점검용역 추진중 추가과업(안전성평가, 바닥세굴구간 사각형거 준설) 발생에 따른 예산지원 요청에 대한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역 현황

○ 사 업 명 : ********** 외 10개소 사각형거 정밀점검용역

○ 사업위치 : ******************* 외 10개소

○ 사업규모 : 1.5×1.5~2□2.4×1.8, L=4,920m

○ 사 업 비 : *********(시비)

Ⅱ		추가예산 요청개요

○ 구조적 변위 및 파손구간에 대한 구조안전성 검토 시행

- 요청사유 : 사각형거 정밀점검 구간내 슬래브 처짐, 상부슬래부

철근 피복부족, 철근노출(철근뚜께 감소) 등이 발견됨에 따라 구조안전성 검토 필요

- ***************(구조안전성 검토 × 6개소)

· 25-2구간, 25-3구간, 27구간, 28구간, 28-1구간, 31구간

○ 바닥 세굴(파손) 구간 물돌리기 및 준설후 재조사 시행

- 요청사유 : 사각형거 정밀점검결과 바닥세굴 구간에 토사 등이

퇴적되어 물돌리기및 준설후 재조사 필요

- 소요예산 : *********(물돌리기 및 바닥준설 × 4개소)

· 7구간(Sta.0~390), 21-2구간(Sta.0~60), 28-1구간(Sta.0~117)

· 30구간(Sta.0~740)

○ 현장 사진

******************	************
**************	**************

Ⅲ		검토 의견

○ 사각형거 정밀점검용역 추진중 일부구간에서 철근 피복두께 부족에 의한 슬래브 변형(처침), 장기 공용에 따른 철근노출 및 직경 감소, 바닥 세굴(파손)구간 토사 적치 등이 발견됨에 따라, 구조안전성 검토 예산을 추가로 지원함이 타당하다고 판단되며, 준설비는 기 지원한 시비 또는 구비를 활용하여 실시.

○ 추가예산 지원 개요

- *************************

· *********************************

· *************************************

- ****************

Ⅳ		행정 사항

○ 점검 용역비 배정 통보 (*********)

(단위 : 천원) *********************************************************************************************************************************************************************************************************

※ ************************************

- 사업 추진시 주의사항

· 사고이월 예산으로 연내 집행이 완료될 수 있도록 용역관리 철저

· 용역 추진시 "서울시 사각형거 점검 및 보수지침" 준수

· 사각형거 보수보강 범위 등에 대해 시와 사전협의 실시

(현장조사 및 재료시험 등을 거쳐 외관조사망도, 수량산출서 작성후 보수보강 범위(물량) 및 방법에 대하여 시와 사전협의 실시

○ 예산과목 : *****************************

*********************

붙임 : 자치구 공문 및 관련자료 각 1부.  끝.