문서번호	치수안전과-974
결재일자	2022. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천계획팀장	치수안전과장
남계동		김현	09/01
			손경철
협 조
	주무관			최명우

준공기한 연기 보고

(중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획 전략환경영향평가 용역(총차, 4차))

2022. 9.

물순환안전국

(치수안전과)

중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획 전략환경영향평가 용역(총차, 4차)

준 공 기 한  연 기 보 고

『중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획 전략환경영향평가 용역』에 대한 환경부의 총차 및 4차 준공기한 연장 요청에 따른 검토 내용을 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획 전략환경영향평가 용역(4차)

○ 용 역 사 : ㈜케이지엔지니어링(공동 ㈜한올엔지니어링)

○ 용역기간 및 용역비

구분		용역기간	용역비(천원)
			합계	환경부(60%)	서울시(30%)	경기도(10%)
전 체		2018.06~2021.12	585,710	351,246	174,882	58,571
기시행		2018.06~2021.09	547,230	328,338	164,169	54,723
	1차분	2018.06~2018.11	300,000	180,000	90,000	30,000
	2차분	2019.06~2019.12	170,000	102,000	51,000	17,000
	3차분주)	2020.06~2021.09	77,230	46,338	23,169	7,723
4차분		2021.12.20.~2022.09	35,710	21,426	10,713	3,571

○ 과업내용 : 중랑천 수계 25개 하천의 환경영향 조사 및  하천기본계획(변경)에 대한 전략환경영향평가 등

Ⅱ		추 진 경 위

○ ‘18.06 ~ ‘21.09. : 1~3차 과업 수행

○ ‘21.12. : 4차 과업 착수

○ ‘22.08.26. : 용역 과업기간 연장 요청(환경부 수자원관리과-1356호)

Ⅲ		준공기한 연기

○ 총차 및 4차분 용역 준공기한 연기

구 분	과 업 기 간		비 고
	당 초	변 경
총 차	‘18.06.19 ~ ‘22.09.05	‘18.06.19 ~ ‘22.12.30	용역비 변동없음
4 차	‘21.12.20 ~ ‘22.09.05	‘21.12.20 ~ ‘22.12.30

○ 준공기한 연기사유

- *********************************************************************************

○ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		향 후 계 획

○ ‘22. 09.~10. : 전략환경영향평가 관계기관 의견수렴, 주민공람 및 설명회

○ ‘22. 11.~12. : 전략환경영향평가서 협의(한강유역환경청) 및 과업준공

붙임 1. 환경부 준공기한 연기 요청 공문 1부.

2. 용역사 과업기간 연장 요청 공문 1부.

3. 실정보고서 1부.

4. 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.