코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	한강교량 일상유지보수공사 감독권한대행 등 책임건설사업기술인 귀하
(경유)
제목	실정사항 승인 통보[반포대교(잠수교) 보수공사]

1. 한강교량감 2022-440호(2022.8.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 『2022년 반포대교(잠수교) 보수공사』보수구간 조정(콘크리트 보수외) 및 공사기간 연장 실정보고 건에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 사업관리 및 품질·안전관리, 정산 등에 철저를 기하여 주시기 바라며, 특히 잠수교 저수심 구간 가시설 구간 작업시 안전장구 착용 등 안전사고 방지에 철저바랍니다.

가. 승인내용

구 분		실정보고 내용		승인내용	비고
		당 초	변 경
내용	반포대교	-연석 ▶단면보수(야간,t=30㎜):378㎡ -신축이음차단장치 : 126m -강재도장 : 2.87㎡	- 보수구간 제외	연석정비는 제외하되. 계약심사 절감액 범위내 일부 가능하니 우선 강재도장 2.87㎡을 반영한 후 잔여 예산으로 신축 이음차단장치 길이 조정 시행
	잠수교	-슬래브 하면(p13~21,24w51) ▶단면보수(t=30㎜) : 168㎡ ▶철근노출(t=30㎜) : 194㎡ -예선/대선 각 60일	-슬래브 하면+교각(잠수+반포, p13~21) ▶단면보수(t=30~50㎜) : 727㎡ ▶철근노출(t=30~100㎜) : 56㎡ -예선/대선(2) 각 107일	좌안 승인
공사기간		'22.5.6~'22.10.13	'22.5.6~'22.12.09(39일 증)	좌안 승인

.끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박상홍		강구조교량팀장	강천수		교량안전과장	09/02
조현석
협조자
시행	교량안전과-29375	(	2022.09.02	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서소문 별관 2층 교량안전과(본관3층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/	park-s-hong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)