실정보고 검토서

공사명

반포천 유역 분리터널 건설공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 서초구 법원로 10

~ 사평대로 240일원

· 규    모 : 유역분리터널

(▣4.5×4.5~D7.1m, 연장 1,162m)

· 공사기간 : '18.02.01. ~ '22.09.30.

· 도 급 비 : 47,927백만원

· 시공사 : (주)호반산업외 1개사

· 건설사업관리 :

㈜도화엔지니어링외 2개사

· 설계사 :

㈜제일엔지니어링외 2개사

실정보고 건명

공사기간 연장에 따른 공사비 실정보고-반포사관 제2022-273호(2022.8.24.)

실정보고

사유

·공기연장(2개월)에 따라 공사마무리에 필요한 직접공사비(임대료, 손료,    운영비 등)를 계상하고자 함.

※ 준공기한 연기 검토보고-방재시설부-24981호(2022.7.12.)

건설사업관리단

검토의견

·공기연장에 따른 사용(운영)기간 증가로 인해 운영비용 및 손료, 실비     반영은 타당하다고 판단됨

변경(안)

구 분	당 초	변 경	증·감
주요 수량	******************* *************** ******************* *************** **************	******************* *************** ******************* *************** ************** *************** ***************	******************** **************** ****************** ***************** *************** ***************** *****************
공사비	***********	***********	***********

예산조치계획

당초 사업비 범위 내 시행 가능

추가 행정절차 이행 필요여부

해당 없음

발주처

검토의견

·책임건설사업관리기술인의 검토의견이 타당하다고 판단되며, 추후 설계    변경시 반영하고자 함

결재

주무관

김재건

치수시설과장

손창익

방재시설부장

09/05

이동훈