문서번호	토목부-29921
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	09/06
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 - 실정보고(수방기간 가로등 원상복구 등) 검토 보고

2022. 09.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(수방기간 가로등 원상복구 등) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 수방기간 임시우회도로(산책로 및 자전거도로) 철거에 따른 가로등 원상복구 및 임시 보안등 이설 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

○ 보행교 실정보고 검토보고(수방기간 가로등 원상복구 건) - 창동상계 제22-170호(`22. 09. 01.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.02.)

○ 도 급 비 :  *************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 실정보고 검토

◆ 수방기간 임시우회도로(산책로 및 자전거도로) 철거에 따른 조명시설

이설 및 원상복구 시행

- 가로등 철거 및 원상복구(2개소), 가로등주 회전(2회/2개소)

- 임시 조명시설 설치 및 철거(3개소), 이설(7개소)

○ 추진경과

- `21.11.17. : 종점부 교대(A2) 가로등 간섭사항 협의(서울시설공단 도로시설처 기전팀)

- `21.11.29. : 지장물 이설요청(도기본⇒서울시설공단)

- `21.12.02. : 이설요청 회신(서울시설공단 도로시설처⇒도기본)

⇒ 원인자 비용 부담 직접 관련시설 이설

- `22.03.07. : 시설물 설치를 위한 지장물 이설 및 복구 실정보고 승인

⇒ 시점부 전기이설 및 종점부 광케이블이설 반영

- `22.05.15. : 수방기간 임시 우회로철거 및 원상복구에 따른 전기시설 이설

○ 가로등 원상복구 및 임시조명시설 철거, 이설 현황도

시점부(A1) 우회도로 철거 전 (임시조명 7개소 설치)	시점부(A1) 우회도로 철거 후 (임시조명 7개소 이설)

종점부(A2) 우회도로 철거 전 (가로등 철거 2개소 및 임시조명 3개소 설치)	종점부(A2) 우회도로 철거 후 (가로등 원상복구 2개소 및 임시조명 3개소 철거)

○ 수량 증·감내역

*****	*****	**	***	***	***		***
********	*********	**	*	*	*	*	***
********	*********	**	*	*	*	*	***
********	*********	**	*	*	*	*	***
*************	****	**	*	*	*	*	***
*************	*********	**	*	*	*	*	***
**************	****	**	*	*	*	*	***
************* ***********	****** ******* *******	*	*	*	*	*	***

○ 공사비 증·감 내역

- ********************************

(단위 : 천원)

*******	***	***	***		***
*******	*	******	*	******	*
*******	*	*****	*	*****	*
*******	*	*****	*	*****	*
*******	*	*****	*	*****	*
************	*	*****	*	*****	*
************	*	*****	*	*****	*
*************	*	*****	*	*****	*
********************	*	******	*	******	*

※제경비 제외공종 적용

○ 신규단가 협의

- 협 의 일 : `22. 08. 04.(목)

- 참 석 자 : *****************************

- 협의결과 : ***************

***	******	******	****
******	********* ***********	*********** **	************ ***************

□ 검토결과 및 조치계획

○ 수방기간 산책로 및 자전거도로 임시우회로 철거 및 가로등, 임시조명

원상복구와 이설에 따른 실정보고내용은 적정한 것으로 판단되며 향후

설계변경시 반영 하고자 함

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고 검토 보고서 1부. 끝.