투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인_건설폐기물 추가 발생 건)

1.업무지시현장 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치공사(장기1차) 주식회사 삼

안, 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치공사(장기1차) 주식회

사 동일기술공사, 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입)설치공사(장

기1차) 케이비아이건설 주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-09-07 17:09:48

3.지 시 내 용

가. 화랑감 제2022-172(2022.09.06.)호와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 건설폐기물 추가 발생 건에 대한 실정보고 요청건에 대하여 승인하오니, 추후 설계변경 시 반영하여 추진하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 하반기 사업추진을 위한 사전행정처리 등 공기지연이 발생되지 않도록 공정관리에 만전을 다하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관	최돈용		광역도로과장	09/07
신정
협조자
시행	토목부-30089	(	2022.09.07	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	cowboy1292@seoul.go.kr	/	부분공개(5)