문서번호	방재시설부-27076
결재일자	2022. 9. 7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		손창익	09/07
			이동훈
협 조

- 반포천 유역 분리터널 건설공사 -

공기연장에 따른 간접비 검토(내부심의) 결과보고

2022.09.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

- 반포천 유역 분리터널 건설공사 -

공기연장에 따른 간접비 검토(내부심의) 결과보고

「반포천 유역 분리터널 건설공사(4차분)」공기연장(2개월)에 따른 간접비 검토(내부심의) 결과보고임

Ⅰ		관련근거

○ 지방계약법 제22조 제2항 및 동법 시행령 제75조 제1항

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제10장 공사계약 일반조건

○ 공정하고 안전한 건설환경 제고방안(행정2부시장 방침, 2022.2.)

- 발주부서 내부검토 후 협상 → 결렬시 기심에서 심의위원회 개최

○ 건설공사 기간 연장에 따른 간접비 실무요령(도기본)

○ 공사(3차분) 연장에 따른 간접비 심의위원회 결과(방재시설부-22522호)

Ⅱ		간접비 청구현황

○ 산정기간

차 수	당 초	변 경	증
4차분	2021.12.1. ~ 2022.7.31.	2021.12.1. ~ 2022.9.30.	2개월

○ 청구금액 : ************

- ********************************************

Ⅲ		간접비 검토결과

□ 내부심의 결과

○ 심의안건 : 4차공사분 연장(2개월)에 따른 간접비 산정 적정성 심의

○ 심의근거 : 지방계약법, 공사계약 일반조건, 간접비 실무요령, 3차공사분 간접비 심의위원회 결과 등

○ 심의위원 구성 ※코로나19 확산으로 인한 서면심의 시행

연 번	소 속	직 위	성 명
1	*****	******	*****
2	*****	******	*****
3	*****	*********	*****

○ 심의의견

구 분	심 의 의 견
관련 법령 적용의 적정성	***********************************************
공기연장의 적정성	*********************************************************** **********************************************************
간접비 지급 (구성항목 등) 적정성	***************************************************************************

□ 최종 조정결과

○ ************************************

○ ***********************************

구 분		시공사 청구	감리단 검토 (심의상정)	심의 결과
1. 간접노무비		***********	***********	**********
2. 경 비	A. 산재보험료	*********	**********	*********
	B. 고용보험료	*******	*********	*******
	C. 기타경비	*********	**********	*********
	D. 보증수수료	*********	*********	*********
계(1+2)		***********	***********	***********
3. 일반관리비		*********	*********	*********
4. 하도급 간접비		**********	***********	**********
5. 공급가액		***********	***********	***********
6. 부가가치세		**********	***********	**********
총 계		***********	***********	***********

Ⅳ		조치계획

○ 감리단 검토 및 내부 심의결과를 반영하여 산출된 금액을 시공사에 최종 통보하고, 계약금액 조정 요청시 내역서에 반영

붙 임 : 심의 의견서 1부.  끝.