문서번호	도시재생과-5218
결재일자	2022.9.7.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		재생시설팀장		도시재생과장		스마트포용도시국장
김경근		정광철		정혜숙		09/07 문성수
협조
	주무관		김연진

★ ◉

「행복가득 플랫폼 건립 기본 및 실시설계 용역」

준 공 정 산  검 토  보 고

2022. 9.

「행복가득 플랫폼 건립 기본 및 실시설계 용역」

준 공 정 산  검 토  보 고

「행복가득 플랫폼 건립 기본 및 실시설계 용역」관련하여, BF인증 용역비 등 정산항목에 대한 준공정산 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 건    명: 행복가득 플랫폼 건립 기본 및 실시설계 용역

○ 설치위치: 송정동 73-594

○ 계약기간: ‘21. 12. 12. ~ ‘22. 8. 31.

○ 계약금액: 118,346,000원

○ 계약상대자: 벼리아키텍 건축사사무소 (대표: 홍종덕)

□ 추진경위

○ ‘21.  9. 23.	건립계획 방침 수립(구청장 방침 제358호)

○ ‘21. 10.  5. ~ 11. 22.설계공모

○ ‘21. 12. 25.            심사위원회 개최(당선: 벼리아키텍 건축사사무소)

○ ‘21. 12.  7.	용역계약 시행(도시재생과 → 재무과)

○ ‘21. 12. 13.            용역착수

○ ‘22.  1. 13.            선금 지급(재무과-1483호)

- 선금결정금액: 82,842,200원

○ ‘22.  3. 11.            준공기한 연장(1차)

- 사    유: 건축위원회 건축·경관 통합심의 결과에 따른 보완 등

- 준공기한: 3. 22.(기정) → 4. 29.(변경)

○ ‘22.  4. 25.            준공기한 연장(2차)

- 사    유: 건축위원회 굴토심의 결과 해당 필지 지반조사 보고서에 대한 보완 필요 및 해당 필지의 건축물 해체 후 지반조사 시행까지의 시간 필요

- 준공기한: 4. 29.(기정) → 8. 31.(변경)

○ ‘22.  8. 30.            완성확인요청서 제출(용역사 → 도시재생과)

□ 준공내용 검토

○ 정산사유: 사후정산 항목 정산

○ 정산내역

(단위:원)

구분		계약금액	준공(정산)금액	증·감(-)	비고
설계비		81,346,000	81,346,000	0
사후정산 항목	BF인증 용역비	20,000,000	23,650,000	증 3,650,000
	BF인증 수수료	7,000,000	1,133,000	감 5,867,000
	지반조사 등 기타	10,000,000	11,723,800	증 1,723,800
합계		118,346,000	117,852,800	감 493,200

□ 행정사항

○ 위와 같이 사후정산 대상 항목에 대해 미사용 금액 감액(- 493,200원) 정산 처리코자 함.

○ 준공검사조서 제출: 재무과

붙 임  1. 준공검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.

2. 완성확인 요청서 1부.

3. 감액동의서 1부.

4. 정산서류 각 1부.

5. 준공검사 사진 1부.  끝.