의원 요구 자료 제출

시 행	동남권추진단-583
결재일자	2022.09.08
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 균형발전정책과장

주무관		총괄계획팀장	동남권사업반장	동남권추진단장	균형발전본부장	결재
최나영		이기호	임춘근	김선수	09/08
					여장권
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1503번, 김민철 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

김민철 의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 1503번

요구내용 : 1. 신설 삼성역 관련 자료요구

- GTX 환승역으로 예정되는 신설 삼성역 관련 자료요구 드립니다.

1. 사업개요

2. 사업경과 (2022년8월까지)

3. 현재 현황 (2022년8월기준)

4. 향후 계획

의원님께서 요구하신 사항에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 사업

○ 사업구간 : 삼성역(2호선) ~ 봉은사역(9호선) 일대 1km

○ 사업규모 : 지하5층, 시설면적 약17만㎡(복합환승센터597m, 철도본선403m)

○ 주요시설 : (지하공간개발) 지상광장, 버스정류장, 공공상업, 주차장 등
(철도건설) 광역철도(삼성-동탄선, GTX-C노선), 위례신사선

○ 사업기간/총사업비: '15. ~ '28./1조 7,459억원 ※ '19.3. 기본설계 기준

□ 사업경과(2022년 8월까지)

○ 영동대로 통합개발 MOU 체결(국토부-서울시) : '16.10.

○ 영동대로 복합개발 기본계획 발표 : '17. 6.

○ 영동대로 복합개발 기본설계 착수 : '18. 2.

○ ｢강남권 광역복합환승센터｣ 승인(국토부) : '19. 6.

○ 토목공사 1~4공구 입찰공고 : '20.7.

○ 우선시공분 공사 착수 : '21. 6.

○ 사업계획(규모) 변경 추진계획 수립 : '21.10.

○ 건축 기본설계 보완 및 토목 변경 실시설계 추진 : '21.11.~

□ 현재 현황(2022년 8월기준)

○ [설계] 라이트빔 및 공공·상업시설 규모 조정, 광역철도 재배치 등 사업계획 변경에 따른 토목분야 변경 실시설계 진행, 건축․시스템 분야 기본설계 기술제안 공사 발주

○ [시공] 지상·지하 지장물 철거 및 흙막이 가시설 등 우선시공분 공사 진행

□ 향후 계획(안)

○ 토목 분야 실시설계 완료 : '22. 9.

○ 본공사 계약 및 착수 : '22.10.

○ 공사 준공 : '28. 4.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (동남권추진단)	담당사무관	이기호 2133-8255
	☎ 전화번호	주무관	최나영 2133-8254
	작 성 일 :'22.09. .