문서번호	물재생계획과-28219
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	09/13
		함명수

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토 보고 (양천구)

2022. 09.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (양천구)

********************** 추진중 비굴착 전체보수 구간내 지장물(나무뿌리 및 시멘트 몰탈) 저촉에 따른 이설공사비 증가분에 대한 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 사업규모 : 하수관로 개량(개착) D450~800㎜, L=263m

하수관로 개량(비굴착) D450~600㎜, L=934m

○ 공사기간 : 2022. 4. 4. ~ 9. 30.

○ 예산현황                                                        (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	********** *******	*******	*******	******	*************** ***************

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 비굴착 전체보수 구간내 지장물 저촉에 따른 이설비 증가

- 사업규모 : 나무뿌리 제거 125개소 → 287개소 (증 162개소)

시멘트 몰탈 제거 D600㎜×15m

- 소요사업비 : **************************

*******

Ⅳ		검토 의견

○ 하수관로 비굴착 전체보수 구간에서 지장물(나무뿌리, 시멘트 몰탈)이 지촉되어 추가 공사가 불가피한 실정으로, 본 공사 낙찰차액을 활용하여 신속하게 추진함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정*********

(단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	********** *******	*******	*******	******	*************** ***************

- 지장물 이설공사비 추가 재배정(낙찰차액)

붙임 : 관련공문 및 증빙자료 각 1부.  끝.