	서부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	보라매공원 복합문화공간 조성사업 건축기획 용역 준공기한 연장 시행

1. 시설과-462호(2022.9.13.)와 관련입니다.

2.『보라매공원 복합문화공간 조성사업 건축기획 용역』에 대하여 아래와 같이 준공 기한 연장을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명: 보라매공원 복합문화공간 조성사업 건축기획 용역

나. 용역기간: 2022.06.20. ~ 2022.09.17.

다. 계약금액: 금20,600,000원(금이천육십만원정)

라. 계약업체: *********************

마. 준공연장 내용

구 분	계 약 기 간	비 고
당 초	2022.06.20. ~ 2022.09.17.
변 경	2022.06.20. ~ 2023.01.16.	122일 연장

바. 연장사유 귀책 소재: 서울특별시 서부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과 여부: 미부과

아. 준공기한 연장 사유

- 공공건축 사업 계획 사전 검토 및 신청기간 부족

- 공모위원회 구성 및 자문기간 부족

- 도시공원(소)위원회 상정기간 부족

- 공공건축 심의위원회 상정기간 부족 등

붙임  1. 보라매공원 복합문화공간 조성사업 건축기획 용역 준공기한 연장 검토 보고 1부.

2. 보라매공원 복합문화공간 조성사업 건축기획용역 중간 보고회 개최 결과 보고 1부.

3. 보라매공원 복합문화공간기획 용역기간연장신청서 1부.  끝.

	시 설 과 장
주무관	김효식		시설관리팀장	이용한		시설과장	09/13
박흥기
협조자	재무팀장	전선훈
시행	시설과-473	(	2022.09.13	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60, 서부공원여가센터 시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-5567	/전송	02-300-5503	/	narechan@seoul.go.kr	/	부분공개(5)