문서번호	생태환경과-22621
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
박혁		현학범	09/13
			김상국
협조
	운영총괄과장		백광진

｢2022년 강서 한강숲 조성 공사｣ 식재수종 변경계획

2022. 9.

한강사업본부

생 태 환 경 과

｢2022년 강서 한강숲 조성 공사｣ 식재수종 변경계획

｢2022년 강서 한강숲 조성 공사｣ 추진 중 일부 수종의 수급이 불가하여 다음과 같이 식재수종 변경하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 공사내용: 팥배나무 등 13종 17,176주 식재

ㅇ 공사기간: 2022. 4. 29. ~ 10. 10.(165일 간)

ㅇ 도 급 비: 금803,512,000원(관급자재 12,738,850원 별도)

ㅇ 도 급 자: (주)태연에프이씨 대표 전창용

ㅇ 공사감독: 서울시설공단(공사감독3처)

□ 변경 필요성

ㅇ 한국조경수협회 조회 등 시장조사 결과, 일부 수종 수급 불가 확인

- 수급불가 수종

(단위: 주, 원)

수종	규격	수량	단가	비고
낙 우 송	H4.0xR12	305	265,127
일본목련	H3.5xR8	110	107,070
생강나무	H1.2	3,640	7,566

※ 조경수목 수급조회 결과 회신[한조협 제2022-226(2022. 7. 4.)호]

□ 변경검토

ㅇ 설계자 의견 조회(’22. 7. 11.) 결과 낙우송 ․ 일본목련 ․ 생강나무를 각각 메타세콰이어 ․ 산딸나무 ․ 찔레나무로 변경이 바람직하다는 기술의견 확인

ㅇ 관계자 실무회의(’22. 8. 30. 제3차) 결과 낙우송 ․ 일본목련을 각각 메타세콰이어 ․ 산딸나무로 변경하는 의견에 동의

ㅇ 생강나무는 관련 지침※상 하천구역 식재 권장 수종 중 내습성･호습성이 양호한 느릅나무와 팽나무로 변경하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

※ 국토해양부 지침(하천구역 내 나무심기 및 관리에 관한 기준, 2007. 5.)

□ 변경계획

ㅇ 위 검토결과를 토대로 다음과 같이 식재수종을 변경

(단위: 주)

변 경 전			변 경 후			비고
수종	규격	수량	수종	규격	수량
낙 우 송	H4.0xR12	305	메타세콰이어	H4.5xB10	305	변경시 공사비 2,989천원 감소
일본목련	H3.5xR8	110	산딸나무	H3.0xR8	110
생강나무	H1.2	3,640	느릅나무	H3.5xR8	76
			팽나무	H3.5xR12	110

※ 위 와 같이 변경 시, 수리영향검토를 다시 할 필요는 없을 것으로 판단됨

붙임  1. 조경수목 수급조회 결과 회신(공문) 1부.
2. 설계서 질의내용 및 검토결과(설계자) 1부.