문서번호	설비부-28856
결재일자	2022. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	09/14
			김호성
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기,통신공사』

준공기한 연장 검토 보고

2022. 9.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 전기,통신공사』

준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립 전기,통신공사』준공기한 연장에 대하여 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 공사(전기,통신)

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422.07㎡(청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	***** **********	**	***********************	*************
		**	***********************	*************
******	**** ***	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

○ 건설사업관리단 : ㈜종합건축사사무소근정, ㈜세움이앤씨건축사사무소

2		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.계약기간의 연장)

○ 전기,통신공사 준공기한 연장 검토 보고 [시립CM제2022-337호 ('22.09.13.)]

3		검토내용

○ 변경내용

계약번호	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공기한
					당초	변경
**************	****	***** **********	**	*************	***********	***********
			**	*************	***********	***********
**************	******	*******	**	***********	***********	***********
			**	***********	***********	***********

○ 변경사유

- 선행공종(건축) 준공기한 연장에 따른 후속공종(전기,통신) 준공기한 연장

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공종(건축) 준공기한 연장으로 후속공종(전기,통신) 준공기한 연장이 적정하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 전기,통신공사 준공기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 각 1부.  끝.