결 과 보 고 서

[율현 책쉼터 조성 공사 공정 회의(9. 14.)]

시설관리팀장		시설과장			결재
김현태		09/15
		김달용
협 조
	공원조성팀장			하종식
	주무관			고병준
	주무관			김보현
	주무관			정인수

	명에 의하여 2022. 9. 14. 율현 책쉼터 조성 공사와 관련하여 공정 회의를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 일반 현황

○ 일  시: 2022년 9월 14일 15:00 ~ 15:30

○ 장  소: 율현공원 관리사무소

○ 참석자: 9명(센터 직원 3명, 시공사 6명)

□ 공정회의 안건

○ 건축

- 수목 이전: 9. 15. ~ 9. 16.

- 컨테이너 3대(시공사 2, 감리/감독 1) 설치: 9. 19.

- 가설 울타리 설치: 9. 20.

- 작업 차량 주차 관련 협조 요청(조경지원과)

○ 전기

- 임시 전기 설치: 9. 14.

- 공원등(표찰번호1-1) 1개소 철거 후 보관 예정

○ 통신, 설비(기계)

- 관급자재 구매 일정 협의

□ 향후 일정

○ 3차 공정회의: 9. 21.

□ 회의 사진

회의 사진

붙임  회의록 1부.  끝.