실정보고 검토서

[해치마당 벽체B 삭제, 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '21.01.08. ~ '22.10.31. · 도 급 비 : 228억원				· 시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 · 감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	*******************************************
실정보고 사유	- 해치마당 벽체 구간 중 건축분야와 중복된 벽체B구간에 대해서, 해치마당(건축) 내부와 연계성을 고려하여 조경공정에서 삭제코자 함.
건설사업관리단 검토의견	- 해치마당 벽체B는 해치마당 리모델링 공사와 연계하여 건축공종에서 설치한 바 공사비용을 삭제하여 정산조치 함이 타당함.
변경(안)	****** **************************************************************************************************** ********************************************************* ******** **************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계변경 반영하고자 함.
결재	주무관	김현곤	공원시설과장	이병호		방재시설부장	09/15
							이동훈
	주무관	신경환	주무관	김규희