문서번호	현장민원과-27968
결재일자	2022. 9. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
현장민원팀장	현장민원과장	중부수도사업소장
이강욱	유충현	09/15
		장청락

『2022년도 원격검침 구축 시범사업』추진상황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

(현장민원과)

『2022년도 원격검침 구축 시범사업』추진상황 보고

인력검침에서 무인자동검침으로 대전환의 일환으로 추진된『상수도 원격검침 구축 기본계획』에 의거 추진 중인 "2022년도 원격검침 구축시범 사업" 추진상황을 보고드림

1		관 련 근 거

□ 상수도 원격검침 구축 기본계획(본부 계측관리과-767,'22.1.26)

○ (원격검침 체계) 디지털 수도계량기, 원격검침단말기를 수용가에 설치하고 사물인터넷(loT 통산)으로 검침값 전송

□ 2022년 원격검침 구축사업 추진계획【시범사업】(현장민원과-1759,'22.2.11)

○ 시범대상(1단계) : 대현산04 중블록(중구), 북악02 중북록(성북구)

※ 2단계('23~'26) : 중부수도사업소 관할 전지역 전면시행

2		사 업 개 요

○ 사업기간 : '22.4.29~12.10

○ 사 업 비 : 478백만원(계약금액)

○ 설치수량 : 7,607수전(대현산 04 : 2,260, 북악 02 : 5,347)

○ 설치방법

- 원격검침 스마트계량기 설치 : 서울시설관리공단

- 원격검침 단말기 설치 : (주)유비콤

○ 도급사 : (주)유비콤(대표이사 박경화)

3		추 진 실 적('22.4.29~9.15)

○ 원격검침 스마트계량기 교체 현황

구분(중블록)	대상	누계	전주 실적	추진율(%)
북악02	4,513	4,097	71	90.8
대현산04	1,961	216	107	11.0
누계	6,474	4,313	178	66.6

○ 원격검침 단말기 성능검사 의뢰(서울물연구원) : '22.6.27

- 성능검사결과 : 경보기 및 시간 동기화 보완 필요

○ 경보기 및 시간 동기화 보완요구(서울물연구원) : '22.9.1

현재, 서울물연구원에서 원격검침 단말기 성능검사(2차) 중

	【추진경과】
○ 2022.1.26 : 2022년 원격검침 구축사업 추진계획(본부) ○ 2022.2.11 : 2022년 원격검침 구축사업 추진계획(시범사업) ○ 2022.4.12 : 2022년 원격검침 단말기 구매계획 및 계약의뢰 ○ 2022.8.12 안전보건협의체 정기회의 결과보고(8월) - 밀폐공간 및 맨홀 내 작업 시 유의사항 안내 - 폭염으로 인한 옥외 노동자 안전사고 예방 안내

4		향 후 계 획

○ 원격검침 단말기 교체 추진 : '22.9월 중순

※ 성능검사결과 이상없을 시 추진

5		추 진 효 과

○  비대면 검침을 통한 사생활 침해 최소화 및 적시 검침으로  시민 체감 만족도 증대

○  안전한 검침 및 인력의 고령화∙기피업무 등 사회변화에 대응할 수 있는 체계 구축

○  실시간 모니터링을 통한 수용가와의 투명성 및 신뢰성 확보