문서번호	녹지관리과-24088
결재일자	2022. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
이한솔		이무림	09/16
			김상국
협조

청사 수목 가지치기 설계변경 검토 보고

공  원  부

(녹지관리과)

청사 수목 가지치기 설계변경 검토 보고

우리 부서에서 추진 중인「청사 수목 가지치기」에 대한 설계변경 사항이 발생하여 다음과 같이 보고 함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 청사 수목 가지치기

○ 위    치: 한강사업본부 청사

○ 공사내용: 가지치기 2,754주,  황금사철나무 식재 1,400주,

고사목 제거 1,380주, 임목폐기물 처리 4.79톤

○ 공사기간: 2022. 9. 8. ~ 10. 5. (28일간)

○ 도 급 비: 금35,892,000원(금삼천오백팔십구만이천원)

○ 도 급 자: 주식회사 청호엘에스(대표 송지승)

○ 현공정률: 50%

□ 설계변경 사유

○ 식재 물량이 추가로 필요한 곳 2개소 발생 (차량 진입구, 청사 외부 경계)

청사 차량 진입구 회양목 식재 30주 추가	청사 외부 경계 황금사철나무 250주, 잔디 식재 7㎡ 추가

□ 변경 세부내용

공종	규격	당초	변경	증·감내역
황금사철나무 식재	H1.2xW0.4	1,400주	1,650주	증) 250주
잔디 식재	0.3x0.3x0.03m	45㎡	52㎡	증) 7㎡
회양목 식재	H0.3xW0.3	0주	30주	증) 30주

□ 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총공사비		35,892,000	40,043,100	증) 4,151,100
도급비	공급가액	32,629,091	36,402,819	증) 3,773,728
	부 가 세	3,262,909	3,640,281	증) 377,372
	소 계	35,892,000	40,043,100	증) 4,151,100

□ 보고자 의견

○ 현장여건에 따른 물량변경 사항을 반영하여 설계변경하고자 함

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 변경도면 1부.

3. 제비율 검증표 1부.  끝.