문서번호	설비부-28967
결재일자	2022. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	09/16
			김호성
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』

관급자재 설계변경 검토보고

2022. 9.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』

관급자재 설계변경 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』관련 건설사업관리단으로부터 접수된 관급자재(수배전반, 비상발전기, 계장제어장치) 설계변경에 대한 실정보고 사항을 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사

□ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

□ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

*************************************************

**************************************

*******************************************************

2		관련근거

□ 전기공사 관급자재 설계변경에 대한 검토보고[제2자유입건 제2022-298호('22.09.14.)]

3		검토내용

□ 관급자재 계약현황

계약번호 (구매관리번호)	계약자	계약건명	차수	계약금액(원)	납품기한
*********** *************	****	*******	**	***********	***********
			**	**********	***********
*********** *************	*******	********	**	**********	***********
			**	**********	***********
*********** *************	*******	*********	**	***********	***********
			**	**********	***********

□ 변경사유

- 전기공사 공정진행 현황을 고려하여 관급자재 설치 및 시공가능 여부에 따른 총차 미계약 물량을 1차분으로 계약물량 조정하기 위함.

□ 변경내용

- 1차분 납품기한 내에 시공 가능한 총차 미계약 물량을 1차분 내역에 반영

계약건명	계약자 (대표자)	차수	계약금액(원)
			당초	변경	증·감
***** **	**** *****	**	***********	***********	****
		**	**********	***********	**************
********	******* *****	**	**********	**********	****
		**	**********	**********	**************
*********	******* *****	**	***********	***********	****
		**	**********	***********	**************

□ 건설사업관리기술인 검토의견

- 공정진행 현황 검토 결과 관급자재 설치 및 시공가능 여부에 따른 총차 미계약 물량을 1차분으로 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어, 관급자재(수배전반, 계측제어장치, 비상발전기)건에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.