실정보고 검토서

[현대해상 앞 경계석 철거 및 재설치, 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공 사 명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	·위 치 : 세종로 1-68 일대 ·규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ ·공사기간 : '21.01.08. ~ '22.10.31. ·도 급 비 : 228억원				·시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 ·감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 ·설 계 사 : ㈜CA조경기술사사무소 외 2
보고건명	*************************************************
보고사유	·고디바~올리브영 건물앞 설치된 기존 경계석을 조정하여 보도판석 포장과 일치시키고자함
건설사업 관 리 단 검토의견	·기존건물이 판석포장과 단차가 있어 기존경계석 높이를 조정 재설치함은 타당하며 공사비 적정하게 산출되었음.
변경사항	·***** *********************************************************************** ·************************************************************ ****************************************************************************************************
사 업 비	사업비는 증액되나 확보된 예산내 수용 가능
행정절차 필요여부	해당없음
검토의견	******************************************** ********************************** ************************************
결재	주무관	김규희	공원시설과장	이병호		방재시설부장	09/16
							이동훈
	주무관	신경환	주무관	김현곤