실정보고 검토서

[시간의정원 맨홀(KT) 철거 및 재설치, 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '21.01.08. ~ '22.10.31. · 도 급 비 : 228억원				· 시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 · 감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	시간의정원 맨홀(KT) 철거 및 재설치[광화문 감 제2022-572호(2022.09.07.)]
실정보고 사유	시간의 정원 조성에 있어 기존 시설(KT맨홀)의 레벨이 높아 공사에 지장을 초래, 이를 조정하기 위하여 맨홀 철거 및 재설치를 검토
건설사업관리단 검토의견	광장 조성 관련 시설물 설치에 지장되는 기존 시설물(KT맨홀) 철거 및 재설치는 타당하다고 판단되며, 공사비 산출 또한 적정함.
*****	****** ****************************************************************************** ********************************************************* ********* ***************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리 기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계에 반영하고자 함.
결재	주무관	신경환	공원시설과장	이병호		방재시설부장	09/19
							이동훈
	주무관	김현곤	주무관	김규희